＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	건설사업관리용역 준공기한 연기 의뢰(국사봉 배수지)

1. 우리부에서 시행중인 「국사봉 및 사당배수지 통합 건설사업관리용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합 건설사업관리용역

나. 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 대표 이우정외 2개사

다. 계약금액 : (전체) 금1,308,125,000원

(4차)    금411,368,000원

라. 용역(당초)기간: (전체) 2016. 12. 5.∼2019. 10. 09.

(4차)  2019.     1.  1.∼2019.  10. 09.

※ 4차 용역 착수일 : 2019. 2. 15.

마. 연기요청 기간 : (전체) 2016. 12. 5.∼2019. 10. 30.(21일)

(4차) 2019.     1.  1.∼2019.  10. 30.(21일)

바. 연기사유귀책소재 : 상수도사업본부

사. 지체상금 부과여부: 미부과

아. 연기사유 : 국사봉 배수지 건설공사 전체공기가 2019. 10. 30일로 연장되어 건설사업관리를 위한 용역기간을 21일 연장

붙임 : 준공기한 연기 보고서(방침문) 1부. 끝.

							시설안전부장
주무관							최이영			시설과장					송병욱					시설안전부장					10/08 신용철
협조자
시행			시설과-10101									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)															/
전화		02-3146-1491						/전송			02-3146-1529					/	eiyoung@seoul.go.kr												/	대시민공개