문서번호	정수시설과-10998
결재일자	2019.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	10/08 유성종
협 조
	주무관			변민용

「제2정수장 공기압축기 구매설치」 계약기간 연장 검토보고

2019. 10.

암사아리수정수센터

「제2정수장 공기압축기 구매설치」

계약기간 연장 검토보고

신규 기기를 설치하기 위하여 케이블 용량 증설이 필요한 사항으로 선행되는 사업이 완료된 후 기기를 설치하고자 계약기간을 연장하고자 함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제2정수장 공기압축기 구매설치

❍ 계약금액 : ************

❍ 계약기간 : ’19.09.23. ~ ’19.11.07.

❍ 사업내용 : 공기압축기 2대 구매설치(부대설비 포함)

❍ 계약업체 : ***********

□ 계약변경 내용 및 사유

❍ 변경사항

계약금액	당 초	************
	변 경	************
	증·감액	변경없음
계약기간	당 초	’19.09.23. ~ ’19.11.07.
	변 경	’19.09.23. ~ ’19.11.30.

※ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재 : 서울시 암사아리수정수센터)

❍ 변경사유

- 공기압축기의 용량변경(20→50HP)에 따른 배전반 및 전원케이블의 용량 증설이 필요한 사항으로 선행되는 수배전반교체사업(제2정수장 여과지) 및 전원케이블 교체 전기공사가 완료 된 후 기기를 설치하고자 함.

□ 향후계획

❍ 계약변경(기간연장) 계약부서 의뢰               : ’19.10.08.

❍ 설치완료(시운전 포함) 및 준공                  : ’19.11.30.  끝.