문서번호	시설보수과-8837
결재일자	2019.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	10/08 이학구
협조

-2019년 도로시설물 세척용역-설계변경(제2회) 시행보고

2019. 10

서부도로사업소

시설보수과

2019년 도로시설물 세척용역

설계변경(제2회) 시행보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2019년 도로시설물 세척용역’에 대하여 추가배정된 예산을 반영 설계변경(제2회)을 시행하므로서 시설물 청결관리에 철저를 기하고자 함.

근 거

○ 도로시설물 세척용역 하반기 작업계획 보고 : 시설보수과-7022(‘2019. 8. 9)호

○ 일상유지보수 추가소요예산 파악제출 : 시설보수과-7940(‘2019. 9. 9)호

○ 도로시설물 일상유지보수 예산재배정 : 도로시설과-11625(‘2019. 10. 1)호

용역개요

○ 용 역 명 : 2019년 도로시설물 세척용역

○ 대상시설 : 64개소(터널6, 지하차도12, 고가14, 일반교량30, 입체교차2)

○ 용역기간 : 2019. 4. 3 ~ 2019. 12. 31

○ 용 역 비 : 1,332,700,000원

○ 계 약 자 : ㈜테크프러스 대표 정용석

추진경위

○ 2019.03.06 : 세척용역 발주

○ 2019.04.03 : 용역계약 및 착수

○ 2019.4~9월 : 1~6차 작업 시행

○ 2019. 9. 9일 : 추가소요예산 요청(세척 2억, 시설물 연간단가 2억)

○ 2019.10. 1일 : 예산 재배정(세척 2억, 시설물 연간단가 2억)

추가배정예산 사용계획

○ 재배정예산 조치계획

- ‘19. 9월 현재 작업지시/완료에 따른 용역비 90% 집행

- ‘19. 10월중 가을맞이 시설물 세척과 11월중 동절기전 세척 작업시행

‣ 세척작업 필요 소요금액 : 332,700천원

‣ 사용금액 : 200,000천원<재배정예산>+132,000천원<집행잔액>

※ 최근 미세먼지로 인한 환경문제가 사회적으로 부각되고 도시 청결상태 유지를 통한 시민 만족도 제고와 주기적인 세척작업이 공기질 개선과 시민건강을 위한 요구사항임을 감안할 때, 10월중 터널전체(남산1, 2, 3호, 금화, 봉산)와 일부 지하차도(증산, 남산2호입구, 서빙고)에 대한 세척작업을 시행하고 11월중 남산 1, 2, 3호터널과 금화터널에 대해 예산에 맞춰 세척을 시행하므로써 시설물의 청결관리에 만전을 기하고자 함.

○ 예산현황

(단위 : 천원)

발주금액	계약금액	집 행 액 (‘19.4~9월)	집행 잔액	재배정액 (사용액)
1,333,000	1,332,700	1,200,000	132,700	200,000

○ 검토의견

- 상기 보고내용과 같이 추가세척 물량을 적용하여 세척을 시행코자 추가배정된 예산을 반영하여 설계변경 시행코자 함.

설계변경 내역 검토

○ 세척물량 증·감 내역

공 종 별		당 초	변 경	증·감
터널 및 지하차도	타일	330,805	391,411	증 60,606
	콘크리트면	311,610	406,837	증 95,227
	난간	8,294	10,675	증 2,381
	보도 바닥면	21,111	25,206	증 4,095
	방음판	21,552	60,460	증 8,908
	터널 내 등기구	6,433	6,433	-
교량고가	난간, 방호벽 등	22,583	11,918	감10,665

○ 용역비 변경내역(추가예산 반영)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	계	1,332,700,000	1,532,700,000	증 200,000,000
	공급가액	1,211,545,455	1,393,363,637	증 181,818,182
	부가가치세	121,154,545	139,336,363	증 18,181,818

○ 예산과목

-	도로시설관리, 터널시설관리(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(200,000천원)

향후계획

○ ‘19. 10~11월 : 가을맞이 및 동절기전 도로시설물 세척 작업 시행

○ ‘19. 12월 : 용역 준공

붙임 : 2019년 세척용역 설계변경(제2회) 내역서 1부.  끝.