문서번호	설비부-15548
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	10/10 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 및 계약취소 검토보고

(자동제어 외 10건)

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 및 계약취소 검토보고

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』와 관련하여 감리단으로 제출된 관급자재(자동제어 외 10건) 납품기한 연기 요청 및 계약취소에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고 드림.

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

○ 공사규모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

○ 용    도: 자동차관련시설(주차장 및 부대시설)

○ 공사기간: 2017. 09. 01. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사금액: **************************************

○ 시 공 사: ************

○ 책임건설사업관리단: ㈜동성엔지니어링

2		관 련 근 거

○ 관급자재 납품기한 연기요청(남산예장 감리 제2019-434, ‘19.09.24.)

○ 관급자재 납품기한 연기요청(남산예장 감리 제2019-442, ‘19.09.30.)

○ 엘리베이터 계약취소 요청(남산예장 감리 제2019-455, ‘19.10.07.)

3		검 토 내 용

○ 관급자재 납품기한 연기 및 취소

연번	품 명	계 약 자	계약금액	납품기한		비고
				당 초	변 경
1	자동제어	****	***********	‘19.12.31.	‘20.12.31.
2	원심펌프	**********	**********	‘19.12.31.	‘20.12.31
3	수중펌프	**********	**********	‘19.12.31.	‘20.12.31
4	냉난방기	*******	*********	‘19.12.31.	‘20.12.31
5			**********	‘19.12.31.	‘20.12.31
6			*********	‘19.12.31.	‘20.12.31
7			**********	‘19.12.31.	‘20.12.31
8	공기 순환기	*******	**********	‘19.12.31.	‘20.12.31
9			*********	‘19.12.31.	‘20.12.31
10			*********	‘19.12.31.	‘20.12.31
11	엘리베이터	*** *****	***********	‘19.12.31.	계약취소 (재구매)

(단위 : 원)

- 연기사유: 주공정(건축) 공기연장에 따른 관급자재 납품기한 조정

- 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부: 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정(건축)의 공사기간 연장(‘20.12.31)에 맞춰 자동제어외 10건 납품기한을 연기하고,

- 엘리베이터는 제조업체와 조달청간 계약종결로 납품연기가 불가하여 계약취소 후 재구매함이 적정한 것으로 판단됨.

4		보고자 의견

○ 관급자재 설치 시기 미도래 및 선행공정(건축) 공기연장에 따른 기계설비공사 관급자재(자동제어 외10건) 납품기한 연기는 적정한 것으로 판단되므로 계약부서에 관급자재 변경계약을 의뢰하고자 함.

○ 관급자재(엘리베이터)는 조달 계약기간 만료에 따른 계약취소 후 선행공정에 맞춰 ‘20년 재구매 입찰을 추진코자 함.

붙임  관련공문 3부.  끝.