문서번호	시설관리과-21533
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강희창		전동근	10/10 정재현
협조

긴급누수복구공사 정산(2차) 보고서

2019. 10. 10.

강남수도사업소

긴급누수복구공사 정산(2차) 보고서

명에 의거 2019년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사를 시공 감독하고 정산(2차) 내역을 다음과 같이 보고 드림.

□ 공사현황(계약)

○ 공 사 명: 2019년 서초․강남구 관내 긴급 누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D=13~2,200mm(누수복구 1,200개소, 인입관개량․불용관 500개소)

○ **************************

○ 계약금액: 금2,008,244,460원

○ 계약기간: 2019. 4. 18. ~ 2020. 6. 30.

□ 정산시행 내용

○ 정산기간: 2019. 7. 1. ∼ 2019. 9. 23.

○ 정산건수

- 긴급누수복구: D=13~900㎜, N=304개소

- 인입관 및 불용관정비: D=13~150㎜, N=9개소

○ 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

- 누수복구(31202): 456,478,000원

- 불용관정비(31201): 15,510,000원

계            : 471,988,000원

○ 정산내역

(단위 : 원)

계약금액	전회까지금액	금회(2차) 정산금액	금회까지 누계금액	지급후 남은금액
2,008,244,460	351,758,000	471,988,000	823,746,000	1,184,498,460

□ 정산시행 내용

○ 정산기간: 2019. 7. 1. ∼ 2019. 9. 23.

○ 긴급 누수복구공사 및 누수복구공사 시 발생한 노후 인입관 개량, 불용관 정비공사에 대한 현장 감독한 바를 따로붙임 정산설계와 같이 시행.

□ 차수별 집행내역

(단위 : 원)

차수별	계약금액	집 행 액				정산기간
		계	상수도관 누수복구	불용관정비
계	2,008,244,460	823,746,000	782,958,000	40,788,000
1차		351,758,000	326,480,000	25,278,000		4.22~6.30
2차		471,988,000	456,478,000	15,510,000		7.1~9.23

예산별 지출 현황
□ 공 사 명: 2019년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)
*******************)******민
□ 정산차수: 2차 정산
예 산 과 목	정산 금액(원)
합 계	계	금회지출금액	기 지출금액
	471,988,000	397,325,170	74,662,830
상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비, (누수복구)	355,988,000	281,325,170	74,662,830
상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비, (불용관정비)	40,000,000	40,000,000	-
자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비, (노후밸브정비)	76,000,000	76,000,000	-

- 금회 정산(2차) 금액 : 471,988,000원

- 금회 지출 금액 : 397,325,170원

- 기 지출금액 : 74,662,830원(e-바로시스템 노무비 기 지급 완료) : 누수복구비 지출

- 기 지출 금액(서울특별시대금e바로시스템)

노무비 지급월	지출금액(원)	예산과목	공문 지출대호
계	74,662,830
2019년 7월	24,942,500	누수복구비	17409(8.8.)
2019년 8월	27,500,330	누수복구비	19492(9.9.)
2019년 9월	22,220,000	누수복구비	21375(10.8.)

따로붙임: 1. 정산 내역서(2차) 1부.

2. 건설사업관리기술자(기성부분 2차)관리조서 1부.

3. 정산 요청서(2차) 1부.  끝.