문서번호	급수운영과-20080
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		중부수도사업소장
김재명	유명수	채재일		10/10 황일람
협 조

「회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

2019. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

「회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사」

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 시행중인「회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사」의 공사감독 기관인 서울시설공단으로부터 제출된 준공기한 연기요청 사항에 대하여 검토하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 회현동2가 86번지 외 7개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요: D=20~300mm, L=1,600m

□ 계약기간: 2018. 4. 17. ~ 2019. 10. 12.

□ 도 급 비: 660,623,370원

□ 계약업체: 태평림건설(주)  대표 이동균

Ⅱ		추진현황

□ 공정 현황

구간		구경	계획(m)	정비(m)	공정율	비고
1구간	회현동2가 86 ~ 60-8	150㎜	135	35	25%
2구간	장충동1가 48-12 ~ 48-10	150㎜	160	160	100%
3구간	태평로2가 33 ~ 310	150㎜	60	60	100%
4구간	서소문동 136 ~ 75-2	200㎜	50	50	100%
5구간	남대문로5가 6-1 ~ 봉래동1가 4-2	300㎜	640	290	45%
6구간	을지로2가 6 ~ 11	200㎜	300	0	-	교통소통
7구간	명동2가 55-1 ~ 충무로1가 22-4	200㎜	180	0	-	상인협의
8구간	중림동 420-1 ~ 419-1	100㎜	75	75	100%
계			1600	670	42%

Ⅲ		보고내용

□ 관련근거

○ 관련공문: 서울시설공단 공사감독 2처-14901(2019.10.10.)호

「준공기한 연기 검토보고서 제출」

○ 준공기한 연기요청 사유

- 6구간 교통소통대책 수립에 따른 작업기간 지연(30일)

- 5구간 노선버스 교통협의로 인한 기간 지연(20일)

- 4구간 민원에 따른 작업시간 변경(14일, 주간 → 야간)

○ 준공기한 연기요청일

- 당초: 2019년 04월 17일 ~ 2019년 10월 12일

- 변경: 2019년 04월 17일 ~ 2019년 11월 29일(50일 연장)

○ 서울시설공단 검토의견

- 상기 도급사의 연기 사유 총 64일 이내인 50일을 연장하여 잔여 작업을 완료하는 것이 타당하다 주장함

Ⅳ		검토의견

□ 6구간 공사구간 내 지장물 등에 의하여 보도에서 ASP-1 구간으로의 도종변경을 위한 굴착허가를 득한 상태이나, 관련 조례에 근거하여 교통소통대책 수립이 진행중인 사항이므로 준공기한 30일 연기 요청은 타당함.

□ 5구간 노선버스 구간 작업으로 인하여 경찰서 교통 협의 및 우회대책 수립을 위한 준공기한 20일 연기 요청은 타당함.

Ⅳ		조치의견

□ 공단 및 시공사의 준공기한 연기 요청을 검토한 결과, 전체 연기 요청 기간 중 일부분(64일 중 50일)이 연기 사유로 인정되므로 요청한 50일 범위 내에서 준공기한을 연기하여 노후 배급수관 개량에 만전을 기하고자 합니다.

○ 귀책사유: 서울특별시 중부수도사업소

○ 지체상금 부과 여부: 미부과

○ 공사기간

- 당초: 2019. 04. 17. ~ 2019. 10. 12.

- 변경: 2019. 04. 17. ~ 2019. 11. 29.

끝.