투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(에너지저장장치) 납품기한 연기 요청(서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사)

우리 본부에서 시행하고 있는 『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사』에 소요되는 관급자재[에너지저장장치(ESS)]에 대해 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경내용

건 명	납품요구번호 (계약번호)	계약금액(원)	납품기한		계약상대자	비고
			당 초	변 경
에너지저장장치	************ (00187014600)	353*****640	**********	**********	국제통신공업(주)

나. 연기사유 : 사용전검사 기준 강화(검사항목 추가)로 인한 사용전검사 소요기간 증가

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 감리단 관련 공문. 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	10/10 임정규
협조자
시행	설비부-15630	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)