문서번호	도시철도사업부-10046
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		신림선과장		도시철도사업부장
김종필		권영민		10/10 최병훈
협 조

『신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

감리원 투입계획 변경에 따른 계약금액 조정 검토 보고

(총괄 8회 및 4차 1회)

2019. 10.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』

감리원 투입계획 변경에 따른 계약금액 조정 검토 보고(총괄 8회, 4차 1회)

『신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)』와 관련하여 건축분야 보조감리원 투입계획 변경에 따른 계약금액 조정 요청에 대한 검토 보고임.

※ 동부엔지니어링(발)2019-2405호(2019.10.2.)와 관련임

Ⅰ				용 역 개 요

◦ 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(1공구)

◦ 규    모 : 연장 2.249km (샛강역~대방역~보라매역, 정거장 4개소)

◦ 계 약 자 : 동부엔지니어링(주) 외 2개사

◦ 계약현황                                                           (단위 : 천원)

구 분	계 약 일	용 역 기 간	계약금액	비 고
총 괄	2011.10.25.	2011.11.01. ~ 2022.03.07.	3,398,380
1차 분	2011.10.25.	2011.11.01. ~ 2017.08.31.	376,000	준 공
2차 분	2017.08.29.	2017.09.01. ~ 2018.04.05.	292,440	준 공
3차 분	2018.04.06.	2018.04.06. ~ 2019.03.26.	652,000	준 공
4차 분	2019.03.22.	2018.03.27. ~ 2020.05.07.	797,000	진행중
잔 여	-	2020.05.08. ~ 2022.03.07.	1,280,940

Ⅱ				검 토 내 용

□ 감리원 투입계획 변경으로 인한 계약금액 조정

◦ 관련근거

- 「지방자치단체 용역계약 일반조건」제6절(과업내용의 변경 및 계약금액의 조정)

-  건축분야 보조감리원 투입계획 변경 승인 통보(도시철도건축부-4099호, 2019.5.30.)

◦ 감리원 투입계획 변경

구 분		총 괄 용 역			4 차 용 역			비 고
		당 초	변 경	증·감	당 초	변 경	증·감
계		302.05인․월	302.05인․월	-	74.08인․월	74.23인․월	증)0.15인월
토목	수석감리사	2016.09.08 ~ 2022.03.07. (83.88인월)	2016.09.08 ~ 2022.03.07. (83.88인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (17.01인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (16.70인월)	감)0.31인월	총괄
	감리사	2016.09.12 ~ 2022.03.07. (65.87인월)	2016.09.12 ~ 2022.03.07. (65.87인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (13.39인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (13.14인월)	감)0.25인월	보조
	감리사보	2017.07.10 ~ 2022.03.07. (44.40인월)	2017.07.10 ~ 2022.03.07. (44.40인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (10.63인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (10.43인월)	감)0.2인월	보조
	감리사보	2018.06.01 ~ 2020.10.31. (23.02인월)	2018.06.01 ~ 2020.10.31. (23.02인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (10.63인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (10.43인월)	감)0.2인월	보조
	감리사보	2018.10.15 ~ 2021.09.20. (27.94인월)	2018.10.15 ~ 2021.09.20. (27.94인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (10.63인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (10.43인월)	감)0.2인월	보조
건축	감리사	2019.02.18~ 2019.05.31. 2020.03.01 ~ 2022.02.10. (26.74인월)	2019.02.18~ 2019.07.17. 2020.03.01 ~ 2021.12.26. (26.74인월)	-	2019.03.27 ~ 2019.05.31. 2020.03.01 ~ 2020.05.07. (4.39인월)	2019.03.27 ~ 2019.07.17. 2020.03.01 ~ 2020.04.29. (5.68인월)	증)1.29인월	보조
기술지원감리원		2016.09.08 ~ 2022.03.07. (30.20인월)	2016.09.08 ~ 2022.03.07. (30.20인월)	-	2019.03.27 ~ 2020.05.07. (7.40인월)	2019.03.27 ~ 2020.04.29. (7.42인월)	증)0.02인월

※ 4차 용역 변경 : 감리원 투입계획 변경으로 계약금액 변경없이 계약기간 변경

(현지사무원 결손 수량 변경 반영 : 당초 13.39월 ⇨ 변경 12.47월, 감) 0.92월)

Ⅲ				조 치 계 획

◦ 상기 검토와 같이 건축분야 보조감리원 투입계획 변경 승인(도시철도건축부-4099호, 2019.05.30.)에 따라 감리원 투입계획 변경 적용

◦ 총괄 용역은 계약금액 및 계약기간 변경없이 감리원 투입계획을 조정·반영하고

◦ 4차 용역은 감리원 투입계획 변경으로 계약금액 변동 없이 계약기간을 조정·반영하여 설계변경 코자 함.

-  당초 74.08인·월 ⇨ 변경 74.32인·월 (증 0.15인·월)

◦ 책임감리용역 변경 내용                                          (단위 : 천원)

구분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총 괄	‘11.11.01~’22.03.07	3,398,380	‘11.11.01~’22.03.07	3,398,380	․ 계약기간 : 변경없음 ․ 계약금액 : 변경없음 ․ 감리원 투입 계획 변경
4 차	‘19.03.27~’20.05.07	797,000	‘19.03.27~’20.04.29	797,000	․ 계약기간 : 감) 8일 ․ 계약금액 : 변경없음

붙 임 : 전면책임감리용역 계약변경 요청서(관련서류) 1부.