문서번호	토목부-18400
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		代이한규	10/11 김용제
협조

건설사업관리기술자 추가배치 검토보고

(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

2019. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설사업관리기술자 추가배치 검토보고

(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 야간공사 시행 및 공정 부진에 따른 대책과 관련 건설사업관리기술자 추가 배치에 대한 검토보고임.

【창덕궁감 2019-128호(2019.10.7.), 실정보고서 제출】

Ⅰ				사업개요

□ 용 역 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 외 2건 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역

□ 용역기간: ’19.04.04.~’19.12.31.(총차 ‘19.04.04.~’20.10.03.)

□ 용 역 비: 523,585천원(총차 913,569천원)

□ 용 역 사: ㈜경동엔지니어링

Ⅱ				검토내용

□ 건설사업관리 기술자 추가 배치 사유

□ 보행자 안전 및 차량통행 혼잡 등을 고려 야간공사 시행

- 경찰청 교통소통규제심의(경찰청 교통관리과-6662호,’19.03.25.) 결과 및 돈화문로, 서순라길의 보행자 안전 및 차량통행 혼잡 방지를 위해 야간공사 시행이 불가피한 실정

□ 종로구청 요구사항 반영에 따른 공사 중지로 부진공정 만회대책 필요

- 종로구청 요구사항 협의 및 설계서 보완 등으로 약 3개월(’19.5.14. ~ ’19.8.19.) 정도에 공사 중지

- 돈화문로 등 공사구간에 각종 행사(국악대축제, 정조대왕 능행차) 개최로 현 공정률(공정률 22%, 계획대비 48%)이 매우 부진한 상태임.

- 부진 공정 만회를 위해서는 주중 외 주말(주, 야) 작업이 불가피한 실정임.

□ 목동사고 재발방지 대책과 관련 감리원 상시 현장 입회 지시(토목부-17677호, ’19.09.30)

- 모든 공사(소소한 작업포함)에 대하여 반드시 감리원이 작업시행 계획 검토 및 입회 지시에 따라 현 인원(책임건설기술자 등 2명)으로는 현장관리가 불가한 실정임.

□ 건설사업관리 기술자 추가 배치내역

분 야	인 원	기 간 (계획)	배치내용	비 고
토목초급	2명	3개월	야간 및 주말 현장감독

□ 용역비 변경 내역

□ 용역비 변경 내역(1차) : 증) 78,425천원

구 분	당 초	변 경	증△감
공급가액	475,986,364	547,281,181	증)71,295,455
부가가치세	47,598,636	54,728,181	증)7,129,545
도 급 액	523,585,000	602,010,000	증)78,425,000

Ⅲ				감리단 검토의견

□ 부진공정 만회 등 원활한 공정관리를 위해 실작업과 연계한 주중 야간, 주말 주․야간 투입에 필요한 건설사업관리기술자 2인 추가투입 필요

Ⅳ				조치의견

□ 상기와 같이 건설사업관리기술자 추가 배치에 대하여 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되므로

□ 실정보고 내용을 승인하고, 추후 예산범위 내에서 설계변경하고자 함.

따로붙임  1. 실정보고서 제출건(건설사업관리기술자 추가 배치요청) 각 1부.

2. 용역비 변경내역서(1차) 1부.  끝.