문서번호	기전과-8459
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이지영	10/11 代성기학

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「안골천 우수암거 단면 확장공사 주변 교통안전시설물 설치공사(표지)」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

동부도로사업소

(기전과)

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

안골천 우수암거 단면 확장공사 주변 교통안전시설물 설치공사(표지) 원인자부담공사 관련 교통안전표지 준공일 변경승인 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 안골천 우수암거 단면 확장공사 주변 교통안전시설물 설치공사(표지)

○ 공사위치 : 서울시 서초구 내곡동 338-1부근

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2020. 06. 30.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
안전표지	대호디엔씨(주)	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜미성기업

검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-8669호(2019.04.11.)

【개선내용】

- 내곡프라자 앞 헌릉로 폭 7.5m, 연장 68m 굴착 및 점용으로 버스정류장        임시 이전 후 교통관리를 위한 신호수 배치하고 보행자 안전에 유의 등

○ 변경사항 : 토목공사의 준공일정이 변경됨에 따른 공사기간 연장

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
안전표지	대호디엔씨(주)	~2019.10.11.	~2020.06.30.

○ 승인조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 교통사고 방지를 위하여 공사전 충분한 공사안내 홍보, 안내표지판 설치 등 준수

- 공사 작업구간에 통제수를 배치하여 교통혼잡 방지 철저

- 야간공사시 공사 구간임을 인지 할 수 있도록 밝은 조도유지

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인 서류를 제출하여여 하며, 변경사항(교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통안전표지공사 업무처리 지침 및 원인자 준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견
○ 대호디엔씨(주)에서 시행하는 안골천 우수암거 단면 확장공사 주변         교통안전시설물 설치공사(표지) 준공일 변경요청에 대하여 현장확인           및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 준공기한 연기 요청 공문.  끝.