등록번호

다산동-9099

주무관

시민생활팀장

다산동장

시민친화국장

부구청장

등록일자

2019.10.8.

조경진

박인경

이종훈

송인상

전결 10/11

신상철

결재일자

2019.10.11.

공개구분

대시민공개

협조

주무관

김계리

동정부팀장

김정선

2019년 사업예산 명시이월 계획

다 산 동

2019년 사업예산 명시이월 계획

우리 동의 2019년 사업예산 중 금년 내 지출을 종료하지 못할 것으로 예상되는 마을활력소 사업예산에 대하여 내년도로 명시이월하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢「지방재정법」 제50조제1항

▢「2020년 지방자치단체 예산편성 운영 기준 및 기금운영계획 수립 기준」

Ⅱ		사업개요

▢ 사 업 명 : 다산동 마을활력소 조성 사업

▢ 사업위치 : 중구 동호로15길 50 다산동주민센터 2층 (279.93㎡)

▢ 사업내용

○  참여전문가와 주민으로 구성된 민관참여 워크숍을 통해 주민센터 2층 유휴공간 설계 및 자율 운영관리 방안 수립

○  워크숍 결과 도출된 설계안으로 최종 설계 및 시공 시행

○  공간 구성 및 활용(안)

구 분	면적(㎡)	현 황	공간 조성(안)
2층 전체	51.7	다목적실	◽열린 주민 모임 공간, 회의실 ◽전시실 ◽다산동 마을라디오 방송국
	66.2	다산정
	162.03	동장실,동대본부실

Ⅲ		추진경위

▢ 2019. 3. 29. 찾동 마을활력소 사업 제안서 제출

▢ 2019. 4. 17. 마을활력소 사업 선정 통보

▢ 2019. 5. 29. 마을활력소 사업비 보조금 교부

▢ 2019. 7. ~ 9. 마을활력소 사업설명회 개최 및 주민참여단 모집

▢ 2019. 10. 7. 마을활력소 운영계획 수립 용역 계약 시행

Ⅳ		명시이월 사유

▢ 마을활력소 운영계획 수립 용역 지연 및 민관참여 워크숍 진행 지연으로 당해연도 지출이 어려워 2020년 회계연도로 명시이월하여 사업추진하고자 함

Ⅴ		명시이월 예산

▢ 명시이월 요구액 : 182,000천원(시비 100%)

▢ 명시이월 내역

(단위 : 천원)

사업명	예산과목		예산액	집행(예정)액	명시이월액
	편성목	통계목
주민참여마을활성화	시설비 및 부대비	시설비	160,000	-	160,000
		감리비	2,000	-	2,000
	자산취득비	자산 및 물품취득비	20,000		20,000
계					182,000

Ⅵ		향 후 계 획

▢ 2020. 1. ~ 3. : 마을활력소 공사 시행

▢ 2020. 3. : 마을활력소 시범운영 및 개소식

▢ 2020. 4. : 마을활력소 자율 운영

붙임 1. 명시이월요구서 1부

2. 마을활력소 조성계획(방침) 1부.  끝.