문서번호	기전과-5863
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
이중현		임태수	10/14 代송기영
협조
	주무관		이태근

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토보고

2019. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사』

준공기한 연기 검토보고

『2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사』와 관련, 교통운영과로부터 추가로 요청된 공사구간이 있어 아래와 같이 공사기간을 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

교통운영과-2412(2019. 9. 4.)

【2019년 교통안전인프라 합동점검 결과에 따른 협조 요청】

㈜태영알앤디 태영(신) 2019-109(2019. 10. 8.)

【2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사 준공기한 연기 요청 건】

Ⅱ		공 사 개 요

공  사  명 : 2019년 교통사고 잦은 곳 개선 교통신호기공사

공 사 위 치

- 대림사거리[(영등포구 시흥대로 635) T-GIS명: 대림사거리] 외 4개소

도  급  비 : *********************************

공 사 내 용 : 교통사고 잦은 곳 및 중대한 사고 발생지점 시설개선

공 사 기 간 : 2019. 7. 1. ~ 2019. 10. 30.

시 공 업 체 : ***************

감 리 업 체 : *************

설 계 업 체 : ****************

Ⅲ		준공기한 연기 검토내용

공사기간 연장 사유

- 금천구 시흥대로 304 추가공사로 인한 절대공기 부족

당초 공사기간 : 2019. 7. 1 ~ 10. 30.

변경 공사기간 : 2019. 7. 1 ~ 11. 30.

지체상금 부과여부 : 미부과

※ 책임감리원 검토의견

- 금천구 시흥대로 304(군부대앞교차로)에 공사가 추가됨에 따라 당초 공사기간 내에 준공이 불가능하여 준공기한을 연장하는 것이 적합하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자 검토의견

2019년 교통안전인프라 합동점검 결과 교통안전시설 개선사항을 2019년 10~11월까지 공사완료 요청한 금천구 시흥대로 304 추가공사로 인하여 공사기간을 연장하여 시행하는 것이 적합하다고 판단됨.

Ⅴ		향 후 계 획

2019. 10. 15. : 준공기간 변경 계약 의뢰(관리단속과)

2019. 11. 30. : 공사준공

붙임 : 1. 책임감리원 기술검토의견서 1부.

2. 교통운영과 관련 공문 1부.  끝.