문서번호	세무과-22190
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	10/14 서문수
협조

「2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (9월)

2019. 10

재무국

(세무과)

「2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (9월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 9월중 주요 추진과업 내용과 10월중 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘19. 1. 1 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,439백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 과세예고 자료관리 개선, 세무/세외 통합조회, 수납금액 자동대사 등

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `19. 10. 10.(목) 14:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `19년 9월 과업진행 추진실적 및 10월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분			총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
				누적합계	9월 완료		합계	진행	지연
신규			5	2	0		3	3	0	0
보완			38	22	1		13	13	0	3
총계			43	24	잘못된 계산식		16	16	0	3
유지관리 (운영지원)		중요	11	7	0		4	4	0	0
		상시	1,620	1,620	110		0	0	0	0
합계			1,631	1,627	잘못된 계산식		4	4	0	0
9월 1개 과업 완료
						-MAR-023[재산세] 재산세 조사결정서 결재를 전자결재시스템과 연계
10월 17개 과업 진행
	-SFR-001[구제제도] 과세예고 관리기능 시범개발 -SFR-002[자동차세] 자동차세(주행분) 수시분 부과관리 개선 -SFR-005[총괄과세] 세외수입 정보 조회기능 개발 -MAR-011[지방소득세] 개인지방소득세(종합소득) 홈택스 전자납부번호 연계개선 -MAR-012[지방소득세] 개인지방소득세(종합소득) 신고서 서식단계별 등록관리 -MAR-013[지방소득세] 서울시 납세지 자료수신 및 등록 -MAR-014[지방소득세] 종소 국세청 신고안내문 수신 및 발송 -MAR-017[지방소득세] 양소 예정/확정 신고분 일괄부과처리 -MAR-018[자동차세] 자동차세 용도변경/차종변경 세액계산 -MAR-020[재산세] 재산세(건물/주택분) 통계관리 -MAR-021[재산세] 재산세 과세자료 통계청 제공 -MAR-022[재산세] 재산세 건물토지대장 정비(임대주택자료(렌트홈)활용) -MAR-028[총괄과세] 총괄과세현황조회 조회기능 개선 -MAR-031[압류] 휴면예금 자료조회 및 압류추심 -MAR-037[시스템공통] 대외기관 수신자료 관리 -CSR-002[등록면허세] 정기분 처리 관련 개선 -CSR-003[등록면허세] 대장관리 기능 개선
10월 4개 과업 추가 진행 예정
	-MAR-015 [개인지방소득세] 모두채움 신고분 고지서 발송 -MAR-038 [공통] UI 기능개선 -CSR-011 [체납결손] 통장 입출금 관리 실시간 적용 -CSR-012 전자고지 수시분 확대

따로붙임 1. 2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(9월)  1부.

※ 투입인력 임금지급확인 포함

2. 월간업무 추진현황 보고서(9월)  1부.

3. 주간업무 추진현황 보고서(35주~39주) 각 1부.

4. 사업추진 현황(일정 등) 1부.

5. 회의록 등 각 1부.

6. 산출물(MAR-023) 각 1부.   끝.