급수공사비 변경 발생 보고(청룡동 868-*)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
배진원	서규석	10/14 이성환
협 조

문서번호 :	급수운영과-19138

급수운영과-19099(2019.10.14.)호와 관련하여 지역담당 업무수행 중 급수공사비 변경이 발생에 따른 내용을 아래와 같이 보고드림

▢ 현황

○ 공 사 명 : 2019년 청룡동 외9개동 상수도공사

○ 건 축 주 : *******

○ 위    치 : 서울시 *************

○ 건축용도 : 근린생활시설 9실(739.24㎡), 오피스텔 96호(3,092.4㎡)

○ 공사개요

구 분	근생용 독립계량기 (근생용 주계량기)	근생용 자계량기	오피스텔용 주계량기 (오피스텔용 독립계량기)	오피스텔용 자계량기
당 초	25mm * 1	-	40mm * 1	-
변 경	(25mm * 1)	9	(40mm * 1)	96

▢ 보고내용

○ 상기 단독주택 및 근생 신축건물에 대하여 10월 14일 급수공사 승인하였으나, 자계량기 설치 요청으로 인한 원인자부담금 및 정액공사비 추가로 급수공사비 변경고지 하고자함

구 분	계	정액공사비	원인자부담금	비고
당 초	7,510,160	6,953,160	557,000
변 경	42,630,060	13,629,060	29,001,000
추가 금액	35,119,900	6,675,900	28,444,000	증

▢ 조치계획

○ 상기 변경금액을 요금과에 변경고지 의뢰하여 급수공사비를 청구 하고자함

붙임  급수공사비(변경 전·후)산출내역서 각 1부.  끝.