문서번호	도로보수과-5165
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
하승환		오재영	10/14 송만규
협조

설계변경(2회) 검토 보고

(2019년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

2019. 10. 14.

성동도로사업소

도로보수과

설계변경(2회) 검토 보고

(2019년 도로손상부분 긴급복구공사-연간단가)

연간단가 공사로서 공종별 추정 물량이기에 공종별 물량 증·감 발생 하였고, 예산집행철저 지시 공문에 의거 낙찰차액을 사용한 예산범위 내에서 설계내역을 조정하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2019년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

❍ 규    모

- 절삭후덧씌우기 : 124a

- 소규모 인력포장 : 190.5a

- 공동복구 : 130개소

- 야간긴급출동 : 2,340시간

- 부대공 1식

❍ 예    산 : *********

*********************************************   ❍ 계약금액 : ***************

❍ 계 약 자 : ***********

❍ 공사기간 : 2019. 3. 15. ~ 2019. 12. 31.

❍ 공 정 률 : 98%

□ 관련근거

❍ 예산집행 철저 : 도로관리과-14874(’19.9.19.)

- 노후포장 정비사업 사업비 집행(낙찰차액 등) 철저

❍ 낙찰차액 사용계획 검토보고 : 도로보수과-4898(’19.10.1.)

❍ 설계변경(2회) 검토보고 : 토목관리처-481(’19.10.11.)

□ 보고내용

❍ 절삭후 아스팔트 덧씌우기, 도로소파, 망상균열 등 포트홀 예상구간의 소규모 포장복구 공종별 정비물량 변경

❍ 동공탐사용역 조치 결과 동공보수작업 및 속경성 채움재 요청대상 수량 증가에 따른 물량변경

□ 설계변경내용

❍ 주요공종 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
절삭후 아스팔트덧씌우기	t=5cm	a	80	85	증5	실시공 수량에 따른 변경
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 1a 이하적용	a	50	100	증50	소파포장공종별 실시공 수량에 따른 변경
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 2a 이하적용	a	60	74	증14
소파포장복구	야간,T=5~20cm, 3a 이하적용	a	19	16.2	감2.8
동공보수작업	야간, 시간당	hr	72	92	증20	동공보수공종별 수량변경
동공보수 (속경성 채움재 주입)	0.12㎥ 기준	개소	84	87	증3

❍ 변경금액

구 분	설계변경 금액(원)			비고
	당 초	변 경	증·감
총 공 사 비	2,057,528,000	2,275,144,000	+217,616,000
도 급 비	1,353,528,000	1,758,144,000	+404,616,000
관급 자재비	411,000,000	342,000,000	-69,000,000
이 전 비	293,000,000	175,000,000	-118,000,000

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 한국건설관리공사 토목관리처-481(2019.10.11)호 : 시공자로부터 제출된  설계변경(2회) 내용의 주요반영사항에 대해 공사계약 일반조건 및 건설사업관리 업무지침서에 근거하여 검토한 결과

❍ 설계변경 사유와 수량 및 공사비 산출의 적정여부 검토결과 적정하게 반영되었음

□ 조치의견

○ 건설사업관리책임기술자 적정검토 의견과 예산범위내 설계변경 요청된   사항으로 제비율 검증결과 적정 반영되었는바

○ 건설사업관리책임기술자 의견대로 예산 범위내에서 공종별 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙 임 : 1. 설계 변경 내역서 1부

2. 제비율 검증 확인서 1부.  끝.