＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	영등포정수장 배출수시설 진단 및 증설개량 관련 타당성 조사 용역 준공기한 연가요청

1. 생산관리과-10534(’19.10.14)호와 관련입니다.

2.『영등포정수센터 배출수처리시설 진단 및 개량관련 타당성 조사용역』시행중 다음과 같은 사유가 발생하여 부득이 용역 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 영등포정수센터 배출수처리시설 진단 및 개량관련 타당성 조사용역

나. 계약상대자 : ㈜지앤씨환경솔루션 대표 박재형

다. 계약금액 : 15,680천원

라. 변경사항

- 용역기한 변경 : (당초) ’19.8.21 ~ ’19.10.20

(변경) ’19.8.21 ~ ’19.10.31

- 변경사유 : 추가과업 수행

▸ 영등포정수장 증설 부지 한계로 인한 “기계식 여과설비” 도입 검토로 용역기간

연장필요

마. 지연배상금 : 미부과 (계약상대자의 책임에 속하지않는 사유)

첨부 : 1 용역기간 연기 보고 1부.

2. 합의서 1부.끝

	생산부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	10/14 유병기
협조자
시행	생산관리과-10539	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개