“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(준공기한 연기)

1. 도로계획과-13682(2019.10.02.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인「벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사」용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역

나. 용역기간 : 2019.04.05.~2019.10.31.

다. 용 역 비 : 166,430천원

라. 용역기관 : 주식회사 도화엔지니어링

마. 변경내용(용역기간)

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	2019.10.31.	2019.12.31.

- 연기사유 : 측량과업 추가에 따른 대안노선 및 기술적 타당성 검토 등을 위하여 과업
기간 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 준공기한 연기보고(방침) 1부

3. 합의각서 등 1부  끝.

	도로계획과장
주무관	정유빈		간선도로계획팀장	김경호		도로계획과장	10/14 안대희
협조자
시행	도로계획과-14082	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8080	/전송	02-2133-0763	/		/	부분공개(6)