문서번호	시설보수과-5601
결재일자	2019.10.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		임준빈	10/14 이성재
협조
	주무관		이석근

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』

준공기한 연기보고

2019. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『소화조 정밀점검 및 실시설계 용역』 준공기한 연기보고

우리 센터에서 추진하고 있는 “소화조 정밀점검 및 실시설계 용역“ 에 대하여 준공기한 연기요청에 따라 정밀안전점검에 만전을 기하기 위하여 준공기한을 연장하고자 함.

1		용역개요

가. 용 역 명 : 소화조 정밀점검 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2019.04.26. ~ 2019.10.22.

다. 용 역 비 : 55,767,900원

라. 용역개요 : 소화조 4개소

- 제2처리장 소화조 2개소 : 5지, 10지

- 제3처리장 소화조 2개소 : C-2-1지, A-1-1지

마. 도 급 자 : 백양엔지니어링(주)  대표 최동하

2		보고내용

가. 연기사유

○ 소화조 내부의 정밀점검을 위해서는 소화조 내부의 퇴적물이 처리되어야 가능 함

○ 현재 점검을 시행하지 못한 제3처리장 A-1-1지는 하수처리 운영상 보수 중인 C-2-1지 보수 및 운영개시 후 내부 퇴적물처리가 완료되는 11월 말경에 조사가 가능함에 따라 본 용역 준공기한을 2019.12.31.까지 연기하고자 합니다.

나. 준공기한 연기 : 당초 2019.10.22. ⇒ 변경 2019.12.31.

3		조치의견

○ 계약 상대자인 백양엔지니어링(주) 대표 최동하에게 용역 준공기한 연기내용을 통보하여 변경계약을 시행하고자 합니다.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 실정보고서 1부.  끝