“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사)

1. 한양도성도감-10547(2019.10.11.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 「서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사

- 계약업체 : ㈜재우씨엔씨*********************

- 계약금액 : ****************************

나. 변경내용 : 계약금액 및 계약기간 연장

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	************	*************	*************
계약기간	********************	*********************	******

※ 연장사유 : DDP내 한양도성 성벽 보수정비공사 진행 중 태풍의 영향으로 공사 중지 기간이 30일이며, 현장 여건에 따른 설계변경 검토에 시일이 소요되어 과업기간을 연장하고, 설계변경에 따른 공사비를 증액하고자 함

다. 예산과목

- ***********************************************************************************************

붙임  1. 방침서 1부

2. 공사계약 변경 사유서 1부

3. 합의각서 1부

4. 설계 변경 내역서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	10/14 안중호
협조자	계약총괄팀장	이정렬
시행	한양도성도감-10554	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)