문서번호	교량안전과-17438
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		강구조교량팀장		교량안전과장
장재연		박찬규		10/15 김종호
협 조

2019년 천호대교 보수공사 포장 시공계획

2019. 10.

교량안전과

(강구조교량팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 천호대교 보수공사 포장 시공계획

『2019년 천호대교 보수공사』램프구간(A,E)에 대한 교면 방수 및 아스팔트 포장 시공계획에 대한 검토 보고 임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 천호대교 보수공사

○ 공사기간 : 2019.04.08. ~ 2019.11.29

○ 공사규모 : 교면방수 및 포장 18.4a, 신축이음 유도배수로 설치 32개소, 차량방호책 설치 57m

○ 도 급 비 : 374,693천원

○ 시 공 사 : ㈜범창건설 대표 이덕재

○ 감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□ 교면포장 위치도(E, A램프)

□ 현황 및 문제점

○ ‘18년 정밀안전진단 결과에 따라 램프E, 램프A 등 2개소에 대해 교면포장 보수공사 추진 중임

- 교면 방수 및 포장 : 18.4a (약 360톤)

· 램프E(13.1a, 261톤), 램프A(5.3a, 99톤)

○ 아스콘 공급업체 확인결과 일일 최소 아스콘 공급량을 약300톤으로 하고 있음

- 포장공사 시 교통불편 최소화를 위해 추진중인 '당일굴착·당일복구'를 위한 1일 시공량인 약10a(187톤) 이하의 포장은 여건상 아스콘 수급이 어려운 실정임

□ 조치계획

○ 아스콘 공급이 가능한 물량 범위(300톤 이상)로 포장 시공계획을 수립하여 적기에 포장보수 완료하고자 함

- 타 한강교량 포장공사 일정과 연계하여 원활한 시공계획 수립(동호대교 외)

- 공종별 일자별 구분하여 포장 시공계획 수립

· 1일차(노면파쇄) ⇒ 2일차(바탕면정리 및 단면보수) ⇒ 3~4일차(방수 및 포장)

□ 향후계획

○ 램프E,A 교면방수 및 포장 : 2019.10.15.~10.20.  끝.