문서번호	기전과-8553
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		10/15 정판식
협조

『서울시 중앙버스전용차로 안전속도 5030 』

교통안전표지 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

동부도로사업소

(기전과)

『서울시 중앙버스전용차로 안전속도 5030 』

교통안전표지 설치 계획

『교통사고 사망사고 줄이기 사업』의 일환으로 중앙버스전용차로 안전속도(50, 30km/h) 개선을 통한 안전한 도로교통 환경 조성을 위하여 공사를 시행하고자 함.

1		관련근거

안전속도 5030(중앙버스전용차로) 사업시행 협조 요청 및 예산 재배정 알림

❍ 교통운영과-3458(2019.9.23.)

2		사업위치현황

연번	도로명	연장(km)	차로수(편도)	비고
1	천호대로 (천호대교~황산사거리)	15.4	3~5
2	송파대로 (잠실대교 남단~복정역)	6.3	4~5

3		사업개요

중앙버스전용차로 교통안전표지 공사

❍ 공 사 명 : 서울시 중앙버스전용차로 안전속도 5030 교통안전표지 설치공사

❍ 공사위치

- 천호대로(천호대교~황산사거리), 송파대로(잠실대교 남단~복정역)

❍ 공사기간

- 2019. 10. ~ 11. 29.

❍ 공사개요

- 중형 원형 신설 103매, 철거 102매 등

- 발광형표지판(속도제한표지 900×900) 3SET 및 기타 부대공사 1식

❍ 발주금액 : 금34,510,000원

- 도급비:21,691,000원, 관급비:12,819,000원

❍ 계약방법 : 전자공개 수의계약(지역)

❍ 입찰참가자격 : 건설산업기본법에 의한 금속구조물·창호공사업

등록업체로서 법인등기부상 본점(개인사업자인

경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른

허가·인가·면허·등록신고 등에 관련된 서류에

기재된 사업장)을 서울특별시에 소재한 업체

❍ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,                 교통사망사고 줄이기 사업, 시설비

4		관급자재 구매계획

교통안전표지

❍ 구매수량 : 총 103매

- 천호대로 50매, 송파대로 53매

❍ 발주금액 : 금 6,938,000원

❍ 구매방법 : 조달청 계약의뢰

❍ 제품선정 방안

- 제조사 소재지가 수도권(서울, 인천, 경기)이며, 현재 조달청 등록 업체     - 신속한 A/S 및 가격이 저렴하고, 기능이 우수한 제품 선정

- 장애인, 여성기업, 우수발명품 우선 구매

❍ 제품 선정 및 구매비 합계

(단위 : 원)

품명	규격	단위	수량	제조사	단가	소요경비 추정액	비고
교통안전표지 (최고속도제한표시)	TN-109, Φ900×2mm	매	103	투인산업(주)	67,000	6,901,000
소 계						6,901,000
조달수수료(0.54%)					37,000	37,000
총 계						6,938,000

발광형 교통안전표지

❍ 구매수량 : 총 3대

- 천호대로 1대, 송파대로 2대

❍ 발주금액 : 금 5,881,000원

❍ 구매방법 : 조달청 계약의뢰

❍ 제품선정 방안 : 서울시 교통운영과 제품선정 기준 충족 제품

- 하자보수기간 5년 이상

- 경찰청 표준지침에 적합한 시험성적서 통과 제품

- 장애인, 여성기업, 우수발명품, 교통신기술 우선 구매

- 조달청 제3자단가계약 우수조달 등록 제품

▸ 제품가격이 저렴하고, 태양전지(축전지) 성능이 우수한 제품 선정

- 점검결과 보고 연 2회 이상 및 신속한 A/S가 원할한 제품

❍ 제품 선정 및 구매비 합계

(단위 : 원)

품명	규격	단위	수량	제조사	단가	소요경비 추정액	비고
발광형교통안전표지 (최고속도제한표시)	PLT-T-29, Φ900×60mm	대	3	(주)피엘티	1,950,000	5,850,000
소 계						5,850,000
조달수수료(0.54%)					31,000	31,000
총 계						5,881,000

5		추진일정

2019. 10. : 공사 발주

2019. 10. : 계약 및 착공

2019. 11. : 공사 준공

붙 임 : 1. 예산 재배정 공문 각 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.