문서번호	설비부-15879
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		이종근	10/15 임정규
협조

「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[2차]」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[2차]」

설계변경(정산) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[2차]」의 책임건설사업관리단의 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차)

○ 규    모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)  지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

○ 도 급 액 : 2차 585,849,000원 (총차 633,785,000원)

○ 공사기간 : 2차 ‘18.03.20. ~ ’19.10.18. (총차 `17.09.28. ~ `19.10.18.)

○ 시 공 사 : ㈜세우엔지니어링  대표 어 연

○ 감 리 단 : ㈜한국종합건축사사무소

□ 관련근거

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차) 설계변경 및 정산 검토보고

[한종홍릉 제2019-1698호, 2019.10.10.]

2		설계변경 검토

□ 설계변경 사유

○ 주관부서 추가요청 및 별관동 평면 설계변경 사항 반영

○ 퇴직공제부금, 산업안전보건관리비 및 각종 보험료 외 물가변동분 정산

□ 주요공종 변경 내역

(단위:원)

공 종	당 초	변 경	증감액	구 분
통합배선공사	108,340,382	119,406,571	증)11,066,189	신관동
통합배선공사	40,217,914	56,454,191	증)16,236,277	별관동
CATV공사	13,546,570	14,930,084	증)1,383,514
전관방송공사	26,691,317	26,676,877	감)14,440
CCTV공사	11,738,755	11,457,071	감)281,684
A/V공사	10,408,915	14,559,035	증)4,150,120
비상벨공사	30,481,142	29,745,500	감)735,642

□ 보험료 및 E/S(정산) 내역

(단위: 원)

항 목	당 초	변 경	증‧감	비고
퇴직공제부금비	5,637,643	3,360,000	감)2,277,643
산업안전보건관리비	10,642,818	9,164,954	감)1,477,864
건강보험료	4,368,492,	3,068,530	감)1,299,962
연금보험료	6,398,556	1,192,050	감)5,206,506
노인장기요양보험	286,135	200,987	감)85,148
물가변동(E/S)	11,613,000	10,881,000	감)732,000

□ 설계변경 금액                                    (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
2 차	585,849,000	620,444,000	증) 34,595,000
총 차	633,785,000	668,380,000	증) 34,595,000

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차) 준공정산 설계변경 내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

3		보고자 의견

○ 본 공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 설계변경 처리하고 계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 2부(총차 ,2차).

2. 제비율 검증확인서 1부.   끝.