문서번호	공원녹지과-13930
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		자연생태팀장		공원녹지과장		도시관리국장
장재원		정종열		신재원		10/15 김영식
협조

★ ◉

2020년 산사태 예방사업 추진계획

2019.10.

성   동   구

2020년 산사태 예방사업 추진계획

2020년 산사태 예방사업 대상지로 확정된 대현산 및 매봉산에   대하여 산사태 예방사업을 시행하여 주민의 생명과 재산을 보호하고  주변경관을 개선하여 주민들에게 쾌적한 산림 환경을 제공하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

산지방재과-10793호(’19.10.10.) ｢2020년 산사태 예방사업 추진 계획 알림｣

Ⅱ		추 진 방 향

안전성을 우선 고려하고 자연훼손을 최소화 하여 시설 설치

사업시행 전 산사태취약지역 지정

2020년 우기전(6월) 사업 완료

Ⅲ		그동안 추진경위

2019. 04. 02.  2020년 산사태 예방사업 사업후보지 제출 요청

2019. 05. 01.  2020년 산사태 예방사업 사업후보지 제출(4개소)

2019. 09. 01.  후보지 조사결과(안) 통보(2개소, 178백만원)

2019. 09. 18.  후보지 조사결과(안)에 대한 검토의견 제출

- 검토의견 : 사업비 증액(178백만원 → 450백만원)

2019. 10. 10.  2020년 산사태 예방사업 추진계획 시달

- 2개소(대현산, 매봉산) 397,320천원

Ⅳ		사 업 개 요

위    치: 대현산(행당동 324-334), 매봉산(옥수동 산6-29)

사업내용: 사면정비, 배수로 설치, 위험수목 제거, 흙막이 등

사업기간: 2019. 10. ~ 2020. 6.

총사업비: 397,320천 원(국비 70%, 시비 30%)

- 설계비 : 36,120천 원 / 공사비 : 361,200천 원

Ⅴ		세부추진계획

산사태 취약지역 지정위원회 구성 – 별도 계획수립 예정

- 위원회 구성 : 2019. 10월 중 위원회 구성

‣ 임    기 : 구성일로부터 2년간

‣ 총 인 원 : 10명

☞ 위 원 장 : 도시관리국장

☞ 부위원장 : 공원녹지과장

☞ 당 연 직 : 도시계획과장, 토목과장, 치수과장

☞ 위 촉 직 : 5명 – 추후 결정

- 산사태 취약지역 지정 : 2019. 12월 내 지정

사면안전성 검토용역

- 대    상 : 매봉산(옥수동 산6-29)

- 소요예산 : 미정 (용역설계서 작성 후 서울시 용역비 요청)

- 내    용 : 옥수동 산 6-29 일대 사면의 형태, 토사유실 가능성 등 전문적인 분석을 통해 대상지에 가장 적합한 사방공법 도출

실시설계용역

- 기    간 : 2019. 10. ~ 12.

- 소요예산 : 36,120천 원

- 설계기준

‣「서울형 사방시설 설계 및 시공기준」,「사방사업의 설계·시공 세부기준」

‣「사방사업 실시설계 사전심의 검토기준」

※ 환경 관련 전문가 자문 시행

공    사

- 기    간 : 2020. 1. ~ 6.

- 소요예산 : 361,200천 원

- 중점추진사항 : 우기(6월) 전 공사가 완료될 수 있도록 공정관리 철저

- 시행방법 : 지역제한입찰

- 입찰참가자격

‣ 산림조합(지역조합) 또는산림조합중앙회, 산림사업법인(산림토목) 등록업체

‣ 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약일)까지 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

Ⅵ		추 진 일 정

2019.10.         : 市 기술용역타상성 심사 의뢰, 사면안정성 검토 및 실시설계용역 발주

2019.11.         : 市 설계심의

2019.12.         : 산사태취약지역 지정, 실시설계용역 완료

2020.01.         : 공사발주

2020.02. ~ 06. : 공사시행 및 완료

붙임  1. 서울시 2020년 산사태 예방사업 추진계획 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.