투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약변경(정산) 의뢰(서울바이오허브 조성(2단계) 통신 공사)

우리 본부에서 추진 중인 『서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차)』와 관련 하여 계약변경(정산) 사항이 있어 아래와 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사

나. 계 약 자 : ㈜세우엔지니어링 대표 어 연

다. 공사기간 : 2017.9.28. ~ 2019.10.18. (총차)

2018.3.20. ~ 2019.10.18. (2차)

라. 변경사항(계약금액)                                           (단위:원)

구 분	계약금액				비 고
	차수	당 초	변 경	증 · 감
통신 공 사	2차	585,849,000	620,444,000	증) 34,595,000
	총차	633,785,000	668,380,000	증) 34,595,000

마. 계약변경 사유 : 기 실정보고 승인건, 별관동  평면 설계변경에 따른 물량조정,  제경비 정산, 물가변동(E/S) 정산 반영

바. 예산과목 : 경제진흥본부 신성장산업과, 신성장산업 육성지원, 산업클러스터 조성 및 활성화, 홍릉바이오의료앵커 조성 및 운영, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 검토 보고서 1부.

2. 정산서류[설계변경내역서 및 합의각서, 제비율 검증 포함] 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	10/15 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-15899	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 6)