투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(2회) 시행 및 계약의뢰

우리사업소에서 시행중인 『2019년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행하고 변경 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019. 03. 15~ 2019. 12. 31(변경없음)

다. 계약금액 : ***************

라. 도 급 자 : ***********

마. 설계변경사유

○ 절삭후 아스팔트 덧씌우기, 도로소파, 망상균열등 포트홀 예상구간의 소규모 포장복구 공종별 물량변경에 따른 낙찰차액 사용

○ 공동탐사용역 조치 결과 동공보수작업 및 속경성 채움재 요청대상수량 증가에 따른 물량변경

바. 변경내역                                                    (단위 : 원)

공 종	금 액			비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
계	*************	*************	*************
도급비	*************	*************	*************
관급비	***********	***********	************
이전비	***********	***********	*************

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로정비공사, 시설비             **************

- 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물, 도로함몰예방사업, 시설비              ************

- 도로관리(6개도로사업소), 사업소 환경개선, 도로사업소사무환경개선, 일반운영비, 공공운영비************

붙임 : 1, 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 건설사업관리책임기술자 검토의견서(별첨).

4. 합의각서. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	오재영		동부도로사업소장	10/15 송만규
협조자	관리단속과장	이우승
시행	도로보수과-5187	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41	/
전화	02-2210-1537	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	부분공개(6)