문서번호	운영과-7167
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
신정현	최영효	10/15 이성재

슬러지 건조시설(증설) 준공 지연에 따른

TMS설비 유지관리 용역 계약변경 계획

2019. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

슬러지 건조시설(증설) 준공 지연에 따른

TMS설비 유지관리 용역 계약변경 계획

슬러기 건조시설(증설) 공사 준공 지연에 따라 TMS설비 유지관리 용역의 계약기간 및 계약금액을 변경 시행하고자 함.

※ 변경내역 : 19.4.1.~10.31.(19,751천원) → ‘19.4.1.~12.31.(25,394천원)

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 슬러지 건조시설(증설) 대기배출시설 TMS설비 유지관리 용역

❍ 용역기간 : 2019.4.1. ~ 10.31.(7개월)

❍ 주요과업 : 월 4회(매주 1회) 이상 정기점검, TMS설비 유지보수 및 교정

❍ 계약금액 : 19,751천 원

❍ 용역업체 : 세종TMS

□ 계약 변경계획

❍ 계약 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	‘19.4.1.~10.31. (7개월)	‘19.4.1.~12.31. (9개월)	2개월 연장
계약금액(원)	19,750,500	25,393,500	증5,643,000원

- 계약기간 : 건조시설 예정준공일(‘19.12.15. 이후), 시설 인수 일정 등을 감안하여 ‘19.12.31.까지 연장

- 계약금액 : 계약단가(2,821,500원/월) 적용

❍ 변경사유 : 건조시설(증설) 설치공사 준공 지연에 따른 대기배출시설 TMS설비 유지관리 필요

※ 건조시설(증설) 인수 후에는 관리대행업체로 업무 이관 예정

❍ 추가 소요예산 : 5,643,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 향후 조치사항

❍ TMS설비 유지관리 용역 변경계약 의뢰(관리과)

❍ 건조시설(증설)공사 준공 및 시설 인수 일정에 따라 용역기간 탄력적 조정

붙임 : 합의각서 1부.  끝.