문서번호	도시공간개선단-14285
결재일자	2019.10.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시건축센터장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
변소윤	임종현	최원석		10/15 김태형
협 조
	도시철도총괄팀장		윤석환

영등포시장역 유휴공간 활용

세부실행계획 수립용역 추진계획(안)

2019. 10.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

영등포시장역 유휴공간 활용 세부실행계획 수립용역 추진계획(안)

활용 가능성이 높은 영등포시장역 유휴공간을 수준높고 지속가능한 공간으로 조성하기 위하여 세부실행계획을 수립하고자 함.

1		추진개요

□ 추진근거

○ ’16.09.05. : 시장요청사항

- “도심 내 유휴 인프라 시설 활용방안 등에 대한 연구 추진”(주관:안전총괄본부)

○ ’17.08.16. : 서울「유휴 지하공간 재생 프로젝트」추진계획 수립(안전총괄본부)

- 추가 발굴된 지하공간 대상, 도시공간개선단에서 활용방안 (컨셉, 설계 등) 모색 후 추진부서 결정

○ ’17.07.28. : 지하 유휴공간 활용사업 종합계획 용역 추진계획 수립

○ ’18.07.27. : 서울 문화예술철도 사업추진 계획수립 (도시교통실)

○ ’19.05.18. : 지하 유휴공간 활용 종합계획 용역 준공

□ 추진배경

○ ‘이동하는 공간에서 향유하는 공간’으로 지하철역사 개선사례 증가

○ 패러다임의 변화로 지하 유휴공간에 대한 재생적 활용방안 모색 필요

○ 정책 변화 및 조성시기 차이 등으로 영등포시장역사 내 유휴공간 발생

□ 추진목적

○ 면밀한 사전기획 및 검토를 통해 수준 높고 지속가능한 문화·예술 향유공간의 조성 실현화

○ 문화예술철도 사업과 연계한 실행계획을 통해 유휴공간 활용의 다각화 및 확대 발판 마련

□ 추진경위

○ ’18.05.24.~ ’19.05.19.: 지하 유휴공간 활용 종합계획 용역 수행

- 영등포시장역 지하 유휴공간 등의 현황 분석 및 활용에 관한 구상(안) 수립

○ ’18.09.06.: ********************************

- **************************************

○ ’18.11.19.: 영등포시장역 유휴공간 활용 사업 ****************

- 영등포시장역 유휴공간 활용 사업화를 위한 *******************

○ ’19.02.~06.: 문화예술철도(영등포시장역) 기본계획 수립(콘텐츠․공간․운영분야)

○ ’19.06.13.: *******************************

- ***********************************

○ ’19.09.02.: 문화예술철도 사업 추진 협의체 회의

- ****************************************************************************

○ ’19.10.~ :  영등포시장역 문화예술철도 *********

- *****************************************

- *************************************

※ ***********************************************************

<세부실행계획 추진 필요사항>

➡ 지하4층 미개방 유휴공간의 상시 활용을 위한 시설 구축 검토

➡ 문화예술철도의 시민체감도를 높이기 위한  건축 구상안 제시

1단계		2단계		3단계		4단계
종합계획 (유휴공간 발굴) -도시공간개선단-	⇒	문화예술철도 1단계 사업 추진 -도시교통실-	⇒	****** ************ -도시공간개선단-	⇒	****** ********** -도시교통실-

2		사업추진계획

□ 추진방향

○ 문화예술철도사업 유휴공간 활용 및 특화계획에 대한 기본방향 설정

○ 지하철 역사 상시 활용 기준에 맞는 시설 구축 계획 및 타당성 검토

○ 지하4,5층 유휴공간 문화예술 콘텐츠와 부합하는 건축 구상안 제시

□ 대상지 개요

○ 위     치 : 영등포구 영등포동 1가 35

○ 지역·지구 : 일반상업지역, 준주거지역

○ 도시계획시설 : 기타철도시설

○ 규     모 :  13,407㎡(영등포시장역사)

- 시설 구축 및 건축 구상안의 주요 공간범위: B4,5층 유휴공간 약1,770㎡

○ 관련계획 및 사업 : 영등포재정비촉진지구

[B4층 유휴공간]	[B5층 유휴공간]

3		용역 시행계획(안)

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 영등포시장역 유휴공간 활용 세부실행계획 수립

○ *****************

○ ****************

○ 추진방식 : 협상에 의한 계약

입찰공고	⇒	입찰등록 및 제안서 제출	⇒	제안서 심사	⇒	협상대상자 선정 및 통보	⇒	협상 및 계약체결

□ 주요 과업내용

○ 영등포시장역사 관련 조사·분석

- 영등포역사 내 기능실 및 대합실, 유휴공간 등 시설현황 조사·분석

- 지하역사 유휴공간 활용을 위한 법제도, 관련기준, 사례 검토·분석

○ 유휴공간 활용을 위한 시설 구축 및 사업계획 검토

- 지하철 역사 상시이용 기준에 맞는 건축, 기계, 전기, 구조 등 시설조성 계획 검토

- 건축, 기계, 전기, 구조 등 시설조성 개략 사업비 산정 및 사업계획 검토

○ 영등포시장역사 통합 마스터플랜 및 유휴공간 개발전략 수립

- 문화예술철도 사업과의 정합성을 제고할 수 있는 건축적 통합 마스터플랜 수립

- 지하4,5층 유휴공간의 공간 활용 전략 제시

○ 영등포시장역사 문화예술철도 사업 관련 구상안 제시

- 지하 4,5층 유휴공간 문화예술 콘텐츠와 부합하는 건축 구상안 제시

- 지하철 역사 내 문화예술공간 조성에 필요한 건축 구상안 제시

○ 관련부서/기관 협의 및 전문가 의견 수렴 등

- 문화예술철도 협의체와의 지속적인 협의 및 의견 수렴

- 시설 구축에 관한 전문가 자문 및 관계기관·부서 협의

□ 기대효과

○ 종합적이고 면밀한 사전검토 및 기획을 통해 2단계 문화예술철도의 가시적 성과를 최대화하여 시민 체감도 및 만족도 제고

○ 문화예술철도 프로토타입 구축을 통해 수준높은 ‘서울형 문화예술철도’ 확대 및 브랜딩화 도모

4		행 정 사 항

□  향후추진계획

○ ’19.10.	기술용역 사전절차 이행

○ ’19.11.~12.	입찰공고 및 계약 체결

○ ’19.12.~’20.03.  중간보고 2회

○ ’20.04.	최종보고 및 성과품 제출

□  소요예산 : *********

○ 용  역  비 : *********

○ 사무관리비 : *************************

※ *****************************************************

○ ********************************************************

□  협조사항

○ *******************************************************

붙 임  용역비 산출 내역서  1부. 끝.