“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비공사 설계변경 지출품의 등록

서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비공사 설계변경과 관련하여 아래와 같이 지출품의 등록하고자 합니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사

- 계약업체 : ㈜재우씨엔씨*********************

- 계약금액 : ****************************

나. 변경내용 : 계약금액 및 계약기간 연장

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	************	************	************
계약기간	********************	*********************	******

※ 연장사유 : 공사 진행 중 태풍의 영향으로 인한 공사 중지 기간과 현장 여건에 따른 설계변경 검토에 시일이 소요되어 과업기간 연장 및 설계변경에 따른 공사비 증액

다. 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 보수정비, 시설비(401-01) : ******************

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 시설비(401-01) : ******************  끝.

★주무관							구선이			도성보존팀장					곽동진					한양도성도감과장					10/16 안중호
협조자
시행			한양도성도감-10675									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-2672						/전송			2133-1063					/	ungum9@seoul.go.kr												/	부분공개(5)