문서번호	설비부-15983
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		代곽용길	10/16 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 전기공사

설계변경(총차, 3차) 시행 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 전기공사

설계변경(총차,3차) 시행 검토 보고

『노들섬 특화공간 조성 전기공사』중 건설사업관리단으로 부터 제출된 주관부서 요청사항(하부조명) 및 현장여건(인입부 공사)을 반영한 설계변경에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 전기공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.10.20

□ 도 급 비 : ********

□ 계 약 자 : ㈜코에버정보기술 외 2

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ ‘18.11.30 : 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회) 승인[도시기반시설본부 18-13940]

○ ’19.05.02 : 실정보고승인(전기 인입방법 개선에 따른 인입선로 추가)[도시기반시설본부-19-487]

○ ‘19.05.17 : 실정보고승인(노들섬 옥외 보안등 위치 변경)[도시기반시설본부-19-487]

○ `19.09.27. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사(장기-3차 2회) 실정보고(02회차) 검토보고[유탑노들 제19-460호]

○ `19.10.04. : 노들섬 특화공간 조성 전기공사(설계변경) 계약심사결과 통보[계약심사과-17221호]

□ 계약변경 현황

○ 변경 사유

- 한강사업본부 요청에 의한 노들섬 하부등 설치(옹벽 구간, 하부 산책로, 태양광 보행등 등)로 금액 증가

- 수전점 인입케이블 시공에 따른 물량 증가 및 현장여건을 반영(오수 스크린 MCCB 시설추가 및 군부대 맨홀 감 등)을 반영한 물량 증감 발생

- 물가변동에 의한 계약금액 조정(보고서 첨부)

○ 주요 변경사항

(단위 : 천원)

공 종	변 경 내 용	금 액	비 고
수변전설비공사	수전관련 인입케이블공사 추가	******
전력간선	변경없음	*
동력,트레이	- 변경없음	*
냉,난방 동력설비	케이블 트레이 및 케이블 물량 증가	*****
전열설비	변경없음	*
전등설비	- 변경없음	*
조명제어설비	변경없음	*
경관조명설비	경관조명 배치 조정에 따른 케이블 수량 증가 노들섬 하단부 조명(옹벽, 계단 등 추가에 따른 배관배선 물량 증가	*******
무대조명, 점멸기 등	변경없음	*
오수정화조 전기공사	- 스크류스크린 및 감시반 MCC 추가 반영	******
군부대 전기공사	군부대 맨홀 2개소 삭제	******
자탐설비	변경없음	*
유도등설비	- 변경없음	*
소 계		*******
제경비	-간노, VAT등 포함	*******
ESC	안전관리비 및 4대보험 정산 ESC 1회보고 ***********************	*******
계		*******

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총차	*************	*************	***********
3차	*************	*************	***********
2차	***********	***********		준 공
1차	**********	**********		준 공

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 총차 및 장기-3차 전기공사 설계변경 내용은 현장여건, 운영자 요구사항에 부합하고 타당하다고 사료됨.

○ 노들섬 하단부 설계변경으로 추가계약(설계변경) 단가적용기준은 낙찰율(86.7484%) 적용하고 적정하게 산출 되었음.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단에서 계약심사결과를 반영한 설계변경 서류를 검토 결과 설계변경 요청내용이 적정한 것으로 판단되어

○ 총무부에 설계변경 및 공사기간 연기 계약의뢰하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.