문서번호	설비부-15995
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박갑임		이종근	10/16 임정규
협조

『서울바이오허브 조성(2단계) 지열시스템 구매설치』

설계변경[총차, 2차(정산)]검토보고

2019. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『서울바이오허브 조성(2단계) 지열시스템 구매설치』

설계변경[총차, 2차(정산)]검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(지열시스템 구매설치) 설계변경[총차, 2차(정산)] 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 자동제어 구매설치

❍ 공사규모

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증  축)  : 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,     〃

❍ 납품기한

- 총  차 : 2017.12.08. ~ 2019.10.18.

- 2   차 : 2018.09.21. ~ 2019.10.18.

❍ 공사금액 : 401,590천원(2차 : 202,500천원)

❍ 계약상대자 : ㈜제이앤지

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

❍ 지열시스템 구매설치 준공정산 요청 : 한종홍릉 제2019-1715(‘19.10.16.)호

3		검토보고 내용

❍ 설계변경 사유

- 2차수 준공관련 4대 보험료 등 제경비 정산 반영

❍ 정산내역(2차수)                                     (단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증/감	비 고
산재보험료	1,777,368	1,777,368	0
고용보험료	396,490	396,490	0
건강보험료	778,573	778,573	0
연금보험료	1,140,390	1,140,390	0
노인장기요양보험료	50,996	50,996	0
퇴직공제부금비	966,076	0	-966,076
안전관리비	4,586,693	0	-4,586,693
기타경비	8,533,884	8,533,884	0
환경보전비	430,732	0	-430,732
계	18,661,202	12,677,701	-5,983,501

❍ 간접비 정산 후 계약금액                                     (단위:원)

차수별	변경 전	변경 후	증감금액	비고
1차	199,090,000	199,090,000	-
2차	202,500,000	195,464,000	-7,036,000
총차	401,590,000	394,554,000	-7,036,000

❍ 책임건설관리사업기술자 검토의견

- 납품사에서 제출한 지열시스템 구매설치 정산요청에 따른 서류 등의 내용 및 관련서류를 검토한 결과 이상이 없는 것으로 정산처리 함이 적절하다고 판단됨.

4		보고자 의견

❍ 현장 시공내역 및 각종 보험료 등을 정산 반영하기 위한 건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 설계변경(정산)을 의뢰 하고자 함.

따로 붙임 : 설계변경 관련 문서 1부.  끝