문서번호	설비부-16025
결재일자	2019.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		이종근	10/16 임정규
협조

「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[2차]」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[2차]」

설계변경(정산) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사[2차]」의 책임건설사업관리단의 설계변경 요청사항에 대하여 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차)

○ 규    모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)  지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

○ 도 급 액 : 2차 2,247,108,340원 (총차 2,497,108,340원)

○ 공사기간  : 2차‘18.03.20. ~ ’19.10.18. (총차 `17.09.28. ~ `19.10.18.)

○ 시 공 사 : ㈜대영이엔티(ENT) 대표 이현정 외 2개사

○ 감 리 단 : ㈜한국종합건축사사무소

□ 관련근거

○ 설계변경 자문 소위원회 결과 통보 [설비부-15456호, 2019.10.8.]

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차) 설계변경 및 정산 검토보고

[한종홍릉 제2019-1717호, 2019.10.16.]

2		설계변경 검토

□ 설계변경 사유

○ 별관동 평면 설계변경에 따른 물량증감내역 및 주관부서 추가 요청사항 반영 ⇒ 설계변경 자문 소위원회 개최 요청

※ 설계변경 자문 소위원회 개최결과에 따른 금액 증감내역 (단위:원)

심의요청금액	심의결과 반영금액	증감액	비 고
183,243,130	150,759,370	감)32,483,760	자문위원 지적사항 반영

○ 보험료(건강,연금,노인장기요양보험) 등 제경비 정산 반영

○ 물가변동(E/S)분 정산 및 설계용역비 추가분 반영

□ 주요공종 및 제경비 변경내역

(단위:천원)

공 종	변경 전	변경 후	증감액	비 고
옥외보안등 공사	28,821	15,987	-12,834	신관동 LED가로등추가, 아스팔트 및 포장제거
수변전설비공사	70,018	48,927	-21,091	별관동 수전용량변경 (900KVA→500KVA)
전력간선공사	146,225	168,398	22,173	진입로 결빙방지 열선 시공
동력공사	55,341	78,485	23,144	별관동 입주공간 인테리어 변경에 따른 배관,배선증가
전열공사	55,195	74,013	18,818
자동제어공사	13,783	21,230	7,447
전기소방공사	59,277	79,149	19,872	별관동 입주공간 변경에 따른 유도등, 감지기 물량증가
제경비 정산	151,851	89,065	-62,786	퇴직공제부금, 보험료 등 정산
물가변동(E/S) 정산	50,400	36,931	-13,469	제경비 정산
변경설계비	0	32,780	32,780	별관동 입주공간 인테리어 변경

□ 설계변경 금액                                     (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
2 차	2,247,108,340	2,295,867,600	48,759,260	증액
총 차	2,497,108,340	2,545,867,600	48,759,260	증액

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차) 준공정산 설계변경 내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨.

3		보고자 의견

○ 본 공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 설계변경 처리하고 계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 2부(총차, 2차).

2. 제비율 검증확인서 1부.   끝.