투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	2019년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-구로, 양천) 설계변경 시행

1. 기전과-10086호(2019.10.15.) 설계변경 보고 관련입니다.

2. 2019년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-구로, 양천)에 대하여 아래와 같이 설계     변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-구로, 양천)

나. 공사기간 : 2019.2.26. ~ 2019.12.31.

다. 계약업체 : ㈜영진제어 대표 이욱한

라. 설계변경금액

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	472,057,870원	722,000,000원	증)249,942,130원

마. 변경사유 : 신설 및 보수물량 증가을 반영한 내역의 변경

바. 예산과목 : 교통안전 시설물 관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비

붙임  1. 설계변경보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	서승완		강서도로사업소장	10/16 박문희
협조자	관리단속과장	박종윤
시행	기전과-10128	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개