＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	옥내배관 교체지원 일일보고〔’19. 10. 17.(목)〕

금일 옥내배관지원팀 일일업무 현황을 아래와 같이 보고합니다.

○ 공사비지원 상담

(단위 : 건)

구 분	계	세대배관	공용배관	컨설팅 대상	컨설팅 비대상	비대상 사유
누계	***	***	*	***	**
금일	*	*	*	*	*
도봉	*	*	*	*	*
노원	*	*	*	*	*
강북	*	*	*	*	*

○ 공사비 지원금 지급 현황

구분	계		공용배관		세대급수관
	가구수	금액 (천원)	가구수	금액 (천원)	가구수	금액 (천원)
금일	-	-	-	-	-	-
누계	******	*********	*****	*********	***** ***********	*******

※ *********************************달성 중(자부담 교체 포함)

○ 아파트 공용배관 추진 현황

- ’19년 공사진행 아파트 단지 현황

연번	단지 명	공사기간	가구수	지원금(천원)	진행공정(%)	비고
1	******	****************	568	*******	**	급수, 급탕
2	****	**************	1,454	*******	**	급수
3	******	***************	1,320	*******	**	급수
4	****	****************	685	*******	**	급수, 급탕

진행 공정 점검결과 **************************************

- ’20년 공사추진 아파트

연번	단지 명	가구수	지원금(천원)	추진사항	비고
1	*******	2,064	*******	업체선정중	’20.6월 준공예정
2	*******	2,029	*******	설계진행중	’20.10월 준공예정
3	*******	2,213	*******	입주민동의중	’20.12월 준공예정
4	*******	2,634	*********	업체선정중	’20.6월 준공예정
5	********	1,944	*******	설계진행중	’20.10월 준공예정
6	********	939	*******	업체선정중	’20.6월 준공예정
7	********	2,265	*******	업체선정중	’20.11월 준공예정
8	****	1,200	*******	업체선정중	’20.6월 준공예정
9	*******	900	*******	설계진행중	’20.3월 준공예정

’20년 아파트 공용배관 추진 단지는 *************가구임.

특히 상계*******************는 ’19년 7월부터 아파트 세대급수관에서 녹물이 심하게 출수되어 주민불편 등 수질검사 민원이 다수 발생한 단지이며, 사업소장, 담당과장, 담당 등 현장을 수차례 방문하여 공용배관 교체공사 권고 등 홍보하여, 업체 선정 등 공사를 추진하고 있음.

○ 자부담 교체 조사 현황

(단위 : 가구)

연번	계	아파트	주택	다세대주택	다가구주택	단독주택
누계	*****	***	***	*****	**	**
금일	*	*	*	*	*	*

○ 기타 업무

- 정례사업소장 회의자료(현안업무) 작성.

· 업무보고 주제 : “아파트 공용배관 추진현황 및 실적”  끝.

주무관	정혜승		주무관	장용수		현장민원과장	10/17 代이선희
협조자
시행	현장민원과-18322	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동) 북부수도사업소	/
전화	02-3146-2918	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(5)