문서번호	도로보수과-10064
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박윤진		류태용	10/17 박문희
협조
	실무관		심혁명

- 2019년 관내포장도로 굴착복구공사 -

설계변경 검토보고

2019. 10.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019년 관내포장도로 굴착복구공사 설계변경 검토보고

2019년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)와 관련하여 책임건설사업관리 용역사로부터 변경설계서가 접수되어 검토보고 드림

	Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명: 2019년 관내포장도로 굴착복구공사(연간단가)-강서

○ 공사규모: 소규모포장복구 104a, 차로복구 106a, 공동복구 113개소

○ 공사기간: 2019.03.28. ~ 2019.12.13.

○ 총사업비: 7,477백만원(도급비:1,521백만원, 도급자: ㈜가빛)

	Ⅱ		예산현황

○ 예산과목

-【굴착복구】도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비

-【공동복구】도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로함몰예방사업, 시설비

○ 현   황                                                        (단위: 백만원)

구 분	예산액			집행현황
	소 계	굴착복구	공동복구	소 계	굴착복구	공동복구
현 황	7,476	7,338	138	3,661	3,640	21

	Ⅲ		설계변경 내용

○ 관련근거

- 2019년 도로굴착복구기금 재배정에 따른 굴착복구공사 추진계획(도로보수과-9844, 2019.10.11.)

- 설계변경서(1회) 제출(한맥 제*******1026, 2019.10.16.)

○ 변경내용

- 물량 변경내역

공 종	규 격	단 위	변경수량		증·감	비 고
			당초	변경
소규모포장복구	굴착복구	a	104	253	증)149
절삭후 덧씌우기	차로단위복구	a	106	253	증)140
공동복구	-	hr	72	72	-

- 도급비 변경내역

【굴착복구】                                                        (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비	3,610,379,000	7,338,000,000	증)3,727,621,000
도급비	1,429,665,270	3,448,093,000	증)2,018,427,730
관급자재비	1,219,151,000	2,657,948,200	증)1,438,797,200
이전비	961,562,730	1,231,958,800	증)270,396,070

【공동복구】                                                        (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총공사비	120,891,000	138,000,000	증)17,109,000
도급비	92,242,000	93,084,000	증)842,000
관급자재비	3,649,000	19,916,000	증16,267,000
이전비	25,000,000	25,000,000	-

- 사업기간: 변경없음

	Ⅳ		조치계획

○ 위 내용으로 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임  검토의견서 및 설계내역서  1부.  끝.