문서번호	시설보수과-8350
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
이상직	오재섭	10/17 고영준

'18/19년 정밀점검 지적사항 조치계획(5차)

(월곡천1복개 등 3개소)

2019. 10.

북부도로사업소

시설보수과

'18/19년 정밀점검 지적사항 조치계획(5차)

(월곡천1복개 등 3개소)

우리 사업소에서 유지 관리하고 있는 도로시설물 3개소(월곡천1·2복개, 월계1교)에 대하여, 2019년 정밀점검 간 지적된 손상사항에 대하여 조치 계획을 보고 드림.

1		관련근거

□ 2019년 정밀점검용역 최종보고회 결과 보고(시설보수과-7614, 2019.9.23.)

□ 2019년 정밀안전점검용역 완료보고(시설보수과-7132,2019.9.4.)

2		손상현황 및 조치계획

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	개 요	안전등급	법정구분	준공년도
월곡천1복개	미아1동110~ 미아8동274-41	B=2.9~10m L=1,573m	B	2종	1970
월곡천2복개	하월곡동67(월곡교) ~하월곡동67-11	B=15~20m L=175m	B	2종	1976
월계1교	노원구 월계동 247	B=19.5m L=125m	B	2종	1978

□ 주요 손상현황 및 보수방안

○ 보수기준

- 도로시설물 보수·보강 우선 순위 선정기준 (도로시설과-15861, 2014.9.10.)에 의거하여 1·2·3순위 순번 기준으로 우선 보수하고,

- 정밀점검 용역 결과, 개별 상태등급이 낮은 구간별/부재별로 우선 보수하여, 시설물 상태평가 점수를 향상할 수 있도록 보수

○ 주요 손상현황 및 보수방안

시설물	상태 등급	주요 손상현황	사진	보수방안
월곡천 1복개	2련 BOX c등급 다수	월곡천 1복개는 1·2·3련 Box로 구성되어 있으며, 1,3련은 대부분 보수가 완료되어 상태가 양호하나, 2련 벽체에 철근 노출이 집중되어 발생되어 있는 상태		2련 벽체 위주로, 철근노출 부위 단면보수(방청) 필요
월곡천 2복개	S1 거더/바닥판 c등급	라멘구간 S1~S5구간 중, S1 바닥판/거더부에 철근 노출 등 손상이 집중되어 있는 상태		S1 바닥판/거더 위주로, 철근노출 부위에 대한 단면보수(방청) 및 열화부 표면보수 필요
월계1교	바닥판 c등급	바닥판하면 상태등급이 c등급(0.400)으로서 등급하락의 주요 원인이며, 신축이음 지점부에 철근노출/단면손상, 슬래브하면에 이전에 발생된 누수(현재 비진행성)에 의한 표면 열화가 발생됨.		신축이음 지점부에 단면보수(방청) 필요하며, 바닥판 하면 중 열화면적이 넓은 S1, S5에 우선 표면보수 필요.

□ 소요예산

○ 개략공사비 : 금374,510천원

○ 세부내역

시설물명	공종	규격	물량	공사비(천원)
월곡천 1복개	콘크리트 단면보수	벽체·천정/철근방청	275.7m2	103,370
월곡천 2복개	콘크리트 표면보수 콘크리트 단면보수	벽체·천정/철근방청	246.3m2 437.1m2	160,650
월계1교	콘크리트 표면보수 콘크리트 단면보수	벽체·천정/철근방청	610.8m2 44m2	110,490
계				374,510

□ 조치 계획

○ 2019년 도로시설물 일상유지 보수공사 업체에 작업 지시하여, 조속히 공사 시행하고, 시공 물량 변동사항은 추후 설계변경시 반영하여 조치하고자 함.

붙임 : 설계내역서 시설물별 각1부.  끝.