문서번호	급수운영과-23395
결재일자	2019.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최선보	문병희	김정수	10/17 代안창수
협 조

준공기한 연기보고 검토(신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사)
「신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사」 준공기한 연기보고 검토
ㅣ

2019. 10.

강서수도사업소

급수운영과

「신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사」

준공기한 연기보고 검토

우리사업소에서 시행중인『신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사』와

관련 준공기한을 아래와 같이 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사 개요

○ 공 사 명 : 신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사

○ 공사개요 : D=200~900㎜  L=158m

○ 공사기간 : 2019. 5. 15. ~ 2019. 10. 20.

○ 도 급 액 : 296,907,650원

○ 수 급 자 : 삼융종합건설(주) 대표 황갑성

○ 공사감독 : 서울시설공단(공사감독2처) 정우영

Ⅱ		공사진행 현황

○ 공 정 율 : 44% (2019.10.17.현재)

- 작업완료사항 : D=200~500㎜  L=70m

- 잔여작업사항 : D=400~500㎜  L=88m

Ⅲ		준공기한 연기

○ 준공기한 연기요청 사항

- 준공기한 연기 사유

*******************************************

*********************

************************************

******************************************

*********************************************

**********************

***************

○ 사업소 검토 내용

*********************

************************************************

********************

*******************************************

*********************************

***********************************

- 준공기간 연기 기간

ㆍ당초 : 2019. 5. 15. ~ 10. 20.

ㆍ변경 : 2019. 5. 15. ~ 12. 14.(총 55일 연기)

- 연기사유 귀책소재 : 발주청

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		준공기한 연기 검토의견

○ 사업소 검토의견

- 도로굴착 관련 유관기관 업무협의 및 관부설 시행에 따른 공사기간을 반영하여 공사기간을 연기함이 타당하다고 사료됨

○ 준공기한 연기

구 분	준공기한 변경	귀책소재	지체상금부과여부
당 초	2019.5.15~2019.10.20	발주청	미 부 과
변 경	2019.5.15.~2019.12.14

Ⅴ		조치 계획

○ 준공기한 연기 사유가 타당하므로 행정지원과에 준공기한 변경계약을 요청하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.  끝.