등록번호	도로시설과-11558		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		생활도시친화국장
등록일자	2019.10.17.
			김봉섭		가순종		신대식		10/17 정택근
결재일자	2019.10.17.
공개구분	대시민공개
			협조	★도로굴착팀장		황인수
[수표로 노후가로등 개량공사] 굴착통제구역 내 도로굴착 계획 보고
생활도시친화국 (도 로 시 설 과)

(수표로 노후가로등 개량공사) 굴착통제구역 내 도로굴착 계획 보고

『수표로 노후가로등 개량공사』 추진 중 지상변압기와 가까운 위험 가로등 이설을 위해 굴착통제구역내 일부 굴착이 필요하여 계획을 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

공 사 명 : 수표로 노후가로등 개량공사

공사업체 : ㈜영풍전력설비 (대표 심문수)

공사기간 : 2019. 4. 30. ~ 2019. 11. 30.

공사개요 : 가로등주 27본, 가로등기구 46등 교체

분전함 3면 철거 2면 설치,  기타 전기공사 1식

공 사 비 : 182,499,850원 - 시비

(도급비 : 97,025,500원, 관급비 : 55,627,130, 이전비 : 29,847,220원)

Ⅱ		보고 내용

현황 및 문제점

− 수표로 중 마른내로~을지로 구간은 보도굴착 통제구간이나, 가로등주 2개소가 한전 지상변압기와 가까워 태풍 등 강풍시 전기 사고 위험이 있어 가로등이설 필요

Ⅲ		조치 계획

주상변합기와 근접한 가로등 2본을 철거하고 맞은편에 일자배열로 변경 시행

− 가로등기초 철거 및 설치를 위해 보도굴착복구 필요 − 13개소

가로등 재배치에 따라 교차로 주변 도로조명 상향 조정을 위하여 가로등주 2본 추가

Ⅳ		행정사항

도로굴착복구 신청하여 가로등기초 설치 및 철거 주변 보도복구- 굴착팀 협조

공사잔액을 활용하여 추가 소요되는 LED등기구 구매 및 교체공사 시행

소요예산 : 약11,698천원(도급비: 9,163,천원, 관급비: 2,535천원).

붙임 : 현장 위치도 및 가로등 배치도 1부. 끝.