문서번호		정보통신처-6027		부장		팀장	처장		본부장(의견있음)
등록일자		2019.10.04.
									10/04
결재일자		2019.10.04.
공개여부		부분공개(5)
				협조	정보통신2사업소 소장
방침번호		본부장-132
					차량계획처 처장
				일상감사 NO 938 / 2019.09.10. / 기술감사처 / 배종한 / (의견첨부)
	『5,7호선 신조전동차 제작 관련』 열차무선 차상장치 설치계획(안)
2019. 9.
정보통신처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	■	□
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	■	□
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

『5,7호선 신조 전동차 제작 관련』

열차무선 차상장치 설치계획(안)

5,7호선 노후 전동차 대폐차 계획에 따른 신조전동차 제작에 열차무선 차상장치 설치를 적기에 수급하여 관련법령에 대응하고 관제와의 통화장치 확보로 안전한 도시철도 운행 확보

Ⅰ		관련근거

□ 차량계획처 『5,7호선 신조전동차(336량) 구매』(42편성)_2019.05.07.계약

□ 하남선(5호선) 철도통합무선통신망(LTE-R) 구매(10편성)_2018.03.22.계약

□ 5호선 열차무선시스템 개량(66편성)_2018.07.24.계약

Ⅱ		현 황

□ 5,7호선 전동차 및 신조전동차 제작 현황

호 선	운용현황	신조전동차 제작 수량	열차무선 차장장치	차량 영상장치	비 고
5호선	76편성	25편성	TRIU(TICS), TRCP, ANT	TVCS, 모니터	~ ‘21.11
7호선	72편성	17편성	2020년 LTE-R 추진 계획		~ ‘22.11

□ 신조전동차 제작 도입에 따른 LTE-R 차상장치는 구형전동차에 설치된 장치를 이전 설치하는 것으로 계약 됨

① TRCP(Train Radio Control Panel) / TRIU(Train Radio Interface Unit)_KWON

TICS(Train Interface Control System)_STraffic / ANT(Antenna)

② TVCS(Train Video Control System)

□ 신조전동차 열차무선 차상장치 신설 및 이전설치 기간

□ 이전설치 기간 : 6개월(중복운용 필요기간)

- 각종 시험/시운전 및 철도안전관리체계 승인을 위함

Ⅲ		현실태(문제점)

□ 이전설치 기간(6개월) 기존 및 신조 전동차 열차무선 차상장치 중복운용 불가피

□ 중복 운용을 위해 열차무선 차상장치 24식(12편성) 필요

□ LTE-R 사업 예비품 수량으로 중복운용 수요 대체 불가

- 5호선 확보 예정 예비품 수량

제조사	대상편성	예비품	비 고
STraffic 차상장치 STraffic 차량영상장치	10편성 (501~510)	9식	SKT 컨소시엄
KWON 차상장치 글로벌텔레콤 차량영상장치	66편성 (511~576)	4식	LGU+ 컨소시엄

- STraffic 및 KWON 열차무선 차상장치는 상호 호환 불가

- STraffic 예비품 9식은 당초 1식에서 하남선 신조전동차(4편성) 추가제안 사항 미설치분으로 Ant. 형태(SISO①)는 기존 개량하는 전동차의 형식(MIMO②)과 달라 호환 불가③

- 이전설치 위한 24식은 STraffic 8식(예비품)과 KWON/글로벌텔레콤 16식(추가구매)으로 추진

Ⅳ		대 책

□ 중복 운용에 필요한 열차무선 차상장치 24국(12편성) 부족분 신규구매

□ 소요예산 : 711,709천원

□ 세부산출 내역(견적서)

대상물품	구매수량	예산(원)	비 고
ANT(MIMO Type)	8대	10,296,000원	STraffic
TRIU/TRCP/ANT	16식	557,972,800원	KWON
TVCS/모니터	16식	143,440,000원	글로벌텔레콤
합 계		711,708,800원

□ 예산편성 : 정보통신처 2020년 (수선유지비)

□ 사업추진 : 정보통신2사업소 예산집행 및 열차무선 차상장치 신설/    이전설치 위한 입·출고 관리

- 사업완료 후 해당 부서별 저장품으로 계정 대체하여 활용

□ 무선국 변경신고/전파사용료 납부 : 정보통신처

□ 설치(신설/이전) : 차량계획처(신조전동차 제작 계약업체(우진산전))

□ 7호선은 열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업 추진(2020년)시 이전설치 고려하여 추진

① SISO(Single-Input Single-Output)  ② MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)  ③ 붙임4. 참조

Ⅴ		결 론

5,7호선 신조전동차 제작사업 중 이전설치 대상인 열차무선 차상장치를 확보하여, 노후전동차 대개폐 사업 진행이 원활하도록 부서간 긴밀히 협조하여 도시철도 안전운행 확보 노력

붙임 1. 견적서 1부.

2. 5,7호선 신조전동차 제작사양서 발췌본 1부.

3. 신조전동차 납품기한 1부.

4. 관련자료 1부.  끝.

[기술본부/본부장/김석태]: 차량제작시 반영될수 있도록 관련부서와 협의바랍니다