투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 변경계약 의뢰 [서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 자동제어 구매설치]

1. 설비부-16181(2019.10.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호 관련하여「서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)」관급자재 구매 계약을 아래와 같이 변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 변경계약 (자동제어 구매설치) 의뢰

나. 계 약 자 : 이에스콘트롤스㈜

다. 변경사유

- 평면이용 변경 및 인테리어 공사로 인한 자동제어 물량 등 변경사항 발생

- 2차수 준공관련 4대 보험료 등 제경비 정산 반영

- 주관부서 건축평면 변경 요청등에 따른 선행공정 지연으로 시운전 및 조정기간 확보 등 원활한 공사진행을 위한 납품기한 연장

라. 변경내용                                                         (단위 : 원)

계약 번호	변 경 내 역				증 ․ 감	비고
	구분	차수	변경 전	변경 후
***** ******	** **	**	***********	***********	**********	************* ******************
		**	***********	***********	**********
	** **	**	***********	***********	*****
		**	***********	***********

마. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 : 미부과)

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 합의서 각 1부.

3. 내역서(총차, 2차) - 별도송부.  끝.

	설비부장
주무관	박갑임		시책사업과장	이종근		설비부장	10/17 임정규
협조자
시행	설비부-16183	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/	hanadaba@seoul.go.kr	/	부분공개(5)