투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	지출품의 승인요청[계약변경(정산) 의뢰(서울바이오허브 조성(2단계) 전기 공사)]

우리부서에서 시행중인 「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(2차)」관련, 계약변경(정산) 지출품의를 아래와 같이 승인요청합니다.

가. 공사명: 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사

나. 계약자: (주)대영이엔티(ENT) 대표 이현정 외 2개사

다. 공사기간: 2017.9.28.~2019.10.18.(총차)

2018.3.20.~2019.10.18.(2차)

라. 변경금액: 48,759,260원(증액)

마. 변경사유: 평면 설계변경, 제경비정산, 물가변동정산 및 설계비 증액분 반영

바. 예산과목: 도시기반시설본부 설비부, 거점성장 기반 마련, 산업클러스터 조성 및 활성화, 홍릉 바이오 의료 앵커 운영, 시설비및부대비, 시설비

(예산편성부서 : 경제정책실 거점성장추진단)

주무관							곽진곤			시책사업과장					전결 10/17 이종근
협조자
시행			설비부-16139									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)