투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	폐기물처리용역 준공기한 연기 의뢰(전체3회및2차제3회)

우리부에서 시행중인『노들섬 특화공간 조성 토목공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 노들섬 특화공간 조성 토목공사 건설폐기물 처리용역

2. 용역개요 : 건설폐기물 운반 및 처리 1식

3. 도 급 자 : (주)문안이엔티

4. 준공기한 연기현황

구 분	도 급 비(원)	착수년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
전체	349,324,000	‘17.11.17	‘19.10.20	‘19.11.15
2차	150,293,000	‘18.06.29	‘19.10.20	‘19.11.15

5. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 시설공사 준공기한 연기에 따른 용역기한 연기

붙임  1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 방침서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	박상철		도시고속도로과장	장수철		토목부장	전결 10/17 김용제
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	토목부-18882	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8662	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	부분공개(5)