＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사』에 대하여 아래와

같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신정배수지 유입부외 2개소 송배수관 정비공사

나. 계약업체 : 삼융종합건설(주) 대표 황갑성

다. 계약금액 : 296,907,650원

라. 준공기한 연기내역

1) 공사기간 ┎ 당초 2019.5.15.~2019.10.20

┖ ********************************

2) 연기사유 : ****************************

3) 귀책소재 : 발주청

4) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 연기 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	최선보		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	10/17 김정수
협조자
시행	급수운영과-23432	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 목동동로 155(신정6동 319-15)	/
전화	02-3146-3943	/전송	02-3146-3989	/	csb8601@seoul.go.kr	/	부분공개(5)