문서번호	공원여가과-1518
결재일자	2019.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원여가과장	서부공원녹지사업소장
한소진	류기혁	강현주	10/18 남길순
협 조
	운영팀장		정동열
	기전시설팀장		윤상섭

노을 가족캠핑장 면 정비공사 추진계획

2019. 10.

서부공원녹지사업소

【공원여가과】

노을 가족캠핑장 면 정비공사 추진계획

노을캠핑장의 텐트간 이격거리를 확보하여 화재예방 등 안전사고 예방으로 캠핑장 이용객들의 건강한 레져문화 활성화에 기여하고자 함.

Ⅰ	추 진 근 거

□ 야영장 관리실태 안전감찰결과(안전감사담당관-1073호, 2018.01.22.)

‣ 화재예방 안전 이격거리 확보 필요(미국 NFPA기준 최소 3.08m)

□「관광진흥법」시행규칙 개정(시행일: 2019.03.24)

‣ 야영용 시설간 이격거리 3m 이상(시행일로부터 2년 이내 조치)

□ 시공원 보수정비사업 대상지 결정 통보 및 추진요청(공원 캠핑장 안전 정비)

【공원녹지정책과-17864(2019.09.24.)】

Ⅱ	노을캠핑장 현황

□ 개    장: 2010년 5월

□ 위    치: 노을공원 4, 5, 7번광장

□ 규    모: 30,520㎡, 3개구역 138면(‘18년 D구역 정비 152→138면 ▽14면)

□ 시설내용: 관리실 1개동, 간이무대 1개소, 음수대 4개소, 전기시설

분전함 48개소, 야외탁자 138개, 화덕 138개

□ 구역별 규모 및 향후 조정계획

❍ 현재 138면(전기 88면, 일반 50면) → 변경 136면(전기 105면, 일반 31면)

구 분	계	5번 광장		7번 광장		4번 광장
		A구역(전기)	B구역(일반)	B구역(일반)	C구역(전기)	D구역(전기)
면 적	30,520㎡	12,590㎡		9,480㎡		8,450㎡
면 수(현행)	138면	31면	20면	30면	24면	33면
면 수(변경)	136면	53면		31면	19면	33면

※ B구역(일반) 전기인입 신설 후 A구역으로 통합

Ⅲ	사 업 개 요

□ 위    치: A, B, C 구역(사이트간 안전기준 이격거리(3m) 미충족 시설)

❍ 138면 중 105면 정비(D구역 33면 ‘18년에 기정비 완료)

□ 규    모: 22,070㎡, 105면

□ 사업기간: 2019. 11. ~ 12.

□ 사 업 비: 금96,103천원

❍ 조경공사: 금59,000천원(도급 54,904천원 / 관급 4,096천원)

❍ 전기공사: 금37,103천원(도급)

□ 사업내용: 사이트간 이격거리 확장, 화덕 철거 및 신설, 전기인입                   신설 및 분전함 이전 등

❍ 조경공사: 사이트간 이격거리 확장 및 조정, 화덕 철거 및 신설

(면정비 105면 → 103면으로 조정 / ▽2면)

❍ 전기공사: 전기인입 신설 및 분전함 이전설치

Ⅳ	추 진 방 법

□ 계약방법: 수의계약(조경공사, 전기공사 분리발주)

❍ 근  거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

❍ 계약사유: 금액이 소액이며, 적기 시공 등 원활한 사업추진을 위하여                    관련경험이 풍부한 전문업체와 수의계약

Ⅴ	공사관련 예산확보 및 자체예산 활용

□ 공원녹지정책과 예산 재배정: 금96,103천원(공사비)

❍ 시공원 보수정비사업 예산 재배정 통보【공원녹지정책과-19592(2019.10.17.)】

❍ 예산과목: 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 공원유지          관리및이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비(도시개발특별회계)

□ 캠핑장 면 정비공사 목적으로 기 확보된 ‘19년 본예산 활용방안

❍ 예 산 액: 금30,000천원

❍ 활용방안: 노을캠핑장, 파크골프장 및 테니스장 내 노후시설 정비로                     이용객 편의시설 개선 및 민원사항 해결

‣ 노을캠핑장 안내판 정비 및 노후 야외테이블 교체: 약17,000천원

‣ 파크골프장 그린 내 파고라 구매·설치           : 약6,000천원

‣ 테니스장 인터넷 간선공사 시행                 : 약7,000천원

❍ 예산과목: 서부공원녹지사업소 공원여가과, 세계적인 환경·생태 테마공원 육성,          산하공원 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비및부대비, 시설비

Ⅵ	향 후 일 정

□ 2019. 10.        : 공사발주 및 계약

□ 2019. 11. ~ 12.: 공사시행 및 준공

Ⅶ	행정사항 및 기타

□ 전기공사 관련 공사감독 협조요청(기전시설팀)

□ 동절기 전 공사시행 및 완료하고자 ‘19. 11. 5일부터 착공예정으로       노을캠핑장 운영규모 조정

❍ B구역 일부(30면), C구역(24면): ‘19.11. 5일부터 운영폐쇄

❍ A구역(31면), B구열 일부(20면): ‘19.11.19일부터 운영폐쇄

❍ D구역: ‘19.11월 지속운영

※ 11월 예약시스템 오픈 시 운영규모 조정사항 웹페이지 ‘알립니다’에 사전공지 완료               (‘19.10.15.14:00 오픈)

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.