“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰(계약금액 조정 및 준공기한 연기)

1. 도로계획과-14362(2019.10.17.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인「호암로 지하통로 확장 및 주변도로 구조개선 타당성 조사」용역에 대해 아래와 같이 계약금액 조정 및 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 호암로 지하통로 확장 및 주변도로 구조개선 타당성조사 용역

나. 용역기간 : 2019.04.05.~ 2019.10.31.

다. 용 역 비 : 79,149천원

라. 용역기관 : 에이스톤엔지니어링(주) 대표 이영순

마. 변경내용 : 계약금액 조정 및 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	2019.10.31.	2019.12.31.
계약금액	73,149,000 원	100,000,000 원

- 연기사유 : 추가 과업 검토를 위한 계약금액 조정 및 과업기간 연장

붙임 : 1. 관련 방침 1부.
2. 변경내역서 1부.
3. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 등 1부  끝.

	도로계획과장
주무관	정유빈		간선도로계획팀장	김경호		도로계획과장	10/18 안대희
협조자
시행	도로계획과-14401	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)