투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	남산공원 시설정비 및 조성공사 추가공종 반영요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 우리 사업소에서 공사발주하고 귀 공단에서 공사감독 수행중인 『남산공원 시설정비 및    조성공사』 관련하여 추가공종을 설계에 반영 시공하여 주시기 바랍니다.

구 분	규 격	당 초	변 경	변경사유
목재데크	T30mm	말라스	멀바우	- 기존 전망대와 동일한 형태로 시공하기 위함
목재난간	W1500×H1200	관급자재	사급자재

가 추가공종 내역

붙임 : 검토 보고서 1부(별송).   끝.

	중부공원녹지사업소장
조경팀장	이종무		시설과장	10/21 김재균
협조자
시행	시설과-4613	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5967	/전송	02-3783-5969	/	mu9494@seoul.go.kr	/	부분공개(5)