문서번호	지역공동체담당관-3208
결재일자	2019.10.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공동체공간조성팀장	지역공동체담당관
김현진	이준학	10/21 최순옥

도봉구 거점형 마을활력소 사업계획 검토보고

2019.  10.

서울민주주의위원회

(지역공동체담당관)

도봉구 거점형 마을활력소 사업계획 검토보고

마을활력소 조성·운영 사업 관련, 자치구에서 제출한 사업계획서의 집행목적 및 타당성 검토결과, 적합한 사업에 대해 예산을 집행(교부)하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

<서울시>

○ 2019년 마을활력소 조성 및 운영 관련 예산신청 안내

- 지역공동체담당관-9369, 2018.8.29.

○ 2019년 거점형 마을활력소 세부사업계획서 제출 및 보조금 교부 신청안내
- 지역공동체담당관-7958, 2019.7.5.

<자치구>

○ 거점형 마을활력소 보조금 교부 신청서 및 세부사업계획서 제출
- 도봉구 자치마을과-22676, 2019.10.7.

□ 추진배경

○ 마을공동체 활동의 지속적 활성화를 위한 구단위 거점공간(마을활력소) 조성

○ 도봉구 마을사회적경제지원센터가 운영주체로 참여하고, 사업이 안정적으로 추진되도록 지원

○ 지역 내 다양한 활동을 아우르는 형태로 활력소 조성하는 한편, 공감워크숍으로 마련한 공간운영세부계획에 따라 향후 운영

	<거점형 마을활력소 공감워크숍>
주민참여단(마을자치센터, 자치구 마을부서, 공간지기, 마을지원활동가 등)을 대상으로 거점형 마을활력소의 의의와 역할, 공간설계 및 공간운영세부계획을 마련하기 위해 추진하는 워크숍

2		사업내용

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 도봉구 거점형 마을활력소 조성

○ 위    치 : 도봉구 쌍문2동 85-38, 85-7(공영주차장 부지)

○ 추진기간 : 2019년 1월 ~ 2021년 4월

○ 시설개요 : 지상4층 (연면적 568.5㎡)

구분	면적(㎡)	주요시설	비고
지상1층	37.5	공영주차장	필로티 구조, 부설주차장(37.5㎡)
지상2층	256	라운지, 돌봄쉼터, 오픈스튜디오, 마을기록관, 커뮤니티까페	벽면 갤러리 조성
지상3층	174	강당
지상4층	101	마을자치센터 사무실 및 회의실
합계	568.5

※ 거점형 마을활력소 공간 : 568.5㎡

- 층별 면적은 서울시 기준(연면적 최소 500㎡이상) 적용하되, 건축 후퇴선 및 이격 거리 등 반영하여 설계 시 변경 가능성 있음

- 지상1층 필로티 구조 및 엘리베이터 설치면적 등으로 손실되는 주차면수(현재 8대)는 인접부지(쌍문동 85-38번지)를 자치구가 추가 매입하여(시 특교금) 현재와 같이 주차장으로 사용할 수 있도록 할 예정

○ 주요내용 : 서울시 주차계획과와 협의하여 시 공영주차장 부지에 거점형 마을활력소를 신축하여 기존 커뮤니티공간을 상호 연결하고 교육 및 컨설팅 등을 제공하는 거점 지원 공간으로 조성·운영

□ 운영개요

○ 운영방식 : 구직영 및 민간위탁으로 민·관 공동운영

<총괄관리> 도봉구청 자치마을과

- 거점형 마을활력소의 소유권과 시설운영 및 관리책임은 자치구에 있음

<마을활력소 운영> 도봉구 마을사회적경제지원센터

- 주민중심의 마을공동체 형성 및 마을공간 활성화를 위해, 마을자치센터를 운영주체로 선정하며 민간위탁 방식으로 운영

○ 운영시간, 세부 프로그램 운영계획, 세부 예산안, 운영위원회 운영 등

- 붙임1 도봉구 거점형 마을활력소 세부사업계획 참조

□ 예산개요

○ 총사업비 : 3,100백만원 (시비총액 3,100)

- 서울시 지역공동체담당관 : 1,700백만원

- 서울시 자치행정과 특별교부금 : 1,400백만원

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후일정

○ 2019. 10월 중	: 서울시비 예산교부

○ 2019. 11월 ~ 2020. 4월	: 설계

○ 2020. 5월 ~ 2021. 4월	: 공사 (2021년 4월 준공 예정)

3		검토결과 및 행정사항

□ 검토내용

*********************************************************************************************************************

**********************************************************************************

********************************************************************************************************

□ 검토결과 : 보조금 교부 결정 (1개소 1,700백만원)

※ 예산과목 : (세부) 커뮤니티 공간 운영지원, (통계) 자치단체자본보조

□ 행정사항

○ 보조금 교부 통보 : 서울시(지역공동체담당관) → 도봉구(자치마을과)

붙임 : 1. 도봉구 거점형 마을활력소 세부사업추진계획 1부.
2. 마을활력소 층별 배치도 1부.
3. 보조금 교부 통보서 1부.  끝.