문서번호	기전과-10293
결재일자	2019.10.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		10/21 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(문래동 지식산업센터 신축)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(문래동 지식산업센터 신축)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-10726(2019.05.01.)호

SK건설 문래 SK V1 cnter 제19-42  (2019.10.21.)호

대영유비텍㈜ 대영전기감GE 19C-10(2019.10.18.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 문래동 지식산업센터 신축공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)     원 인 자 : SK건설

공사기간 : 2019.07.22. ~ 2019. 8. 30.

공사장소 : 영등포구 문래동6가 19 일원

공사개요 : 교통신호기(차/보/경보) 및 지주통합(신호기＋가로등)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동림티엔에스	대영유비텍㈜	㈜승진이티씨	제어기 신설 2, 철거 1대 지주 신설 13본(지주통합 2 포함) 지주 철거 4본 신호등 신설 18, 이설 9조 음향신호기 신설 14대 신호케이블 등

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용 : 시공 중 현장여건 변동으로 인한 물량 변경

주요변경내용

연 번	변경내용	변경사유	조치계획
1	가공선로 1개소(P11~P13) 설치	사업지 내(롯데걸설 앞) 보도 Set-Back 미시행, 설치공간 부족 ※ 원인자부담공사 공사구간 중첩 (SK건설, 롯데건설)	롯데걸설 원인자부담공사 시 지중화
2	보행지주 1개소(P13) 도면과 다른 위치에 설치		롯데걸설 원인자부담공사 시 이설
3	맨홀 1개소 미설치		롯데걸설 원인자부담공사 시 설치
4	횡단보도 구간내 소화전	도로굴착 통제기간(3년)	통제기간 종료 후 관리기관(영등포소방서, 남부수도사업소)에서 이설 예정

※ 변경 상세내역 : 붙임의 실정보고서 참조

Ⅳ		검 토 결 과

감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자, 감리사 및 유관기관 승인 통보

붙임 1. 원인자공문 및 감리사 기술검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.