“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(공사기간 연장)

1. 한양도성도감-10832(2019.10.21.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 ‘한양도성 혜화문 현판 복원 공사’의 공사기간을 아래와 같이 연장하고자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 혜화문 현판 복원 공사

- 계약업체 : 성보보전연구소**********************

- 계약금액 : 금42,416,500원(사천이백사십일만육천오백원정)

나. 변경내용 : 계약기간 연장 (금액변동없음)

- 당 초 : `19. 7. 2. ~ `19. 11. 4.

- 변 경 : `19. 7. 2. ~ `19. 11. 24.(20일 연장)

※ 연장사유 : 현재 진행중인 한양도성 혜화문 보수공사로 인해 복원된 현판 설치 지연되어 공사기간 연장

붙임 1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	10/21 代김종필
협조자	계약1팀장	조현
시행	한양도성도감-10847	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)