투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 계약 의뢰(석촌지하차도외 4개소정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『석촌지하차도 외 4개소 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 석촌지하차도 외 4개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2019.4.30 ~ 2019.10.26.

다. 도 급 자 : ㈜아워브레인 대표 김정호

라. 도 급 비 : 129,982,000원

마.  예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

(61,438,000→ 59,259,000원)

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비

(68,544,000원 → 66,473,000원)

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		용 역 비			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		129,982,000	125,732,000	감) 4,250,000
도급비	공급가액	117,320,000	113,620,000	감) 3,700,000
	부가세	11,732,000	11,362,000	감) 370,000
	자문비	930,000	750,000	감) 180,000

사. 설계변경 사유

- 자문비 감액 및 점검장비 사용일 감소에 따른 도급비 감액

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고 1부

3. 최종자문회의 결과보고서 1부  끝.

	시설보수과장
주무관	이평주		시설보수과장	10/22 임영철
협조자	★주무관	장인숙
시행	시설보수과-6306	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 시설보수과 (대치동) 시설보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0377	/전송	02-2040-0308	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개