문서번호	시설과-10625
결재일자	2019.10.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
정성오		송병욱	10/22 신용철
협 조
	주무관			김형식
	주무관			문정주
	주무관			김기봉
	주무관			최이영

「국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

2019. 10.

상수도사업본부

(시  설  과)

「국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차」

계약금액조정 심사 소위원회 개최결과 보고

「국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차」의 물량 증·감에 대한 계약금액조정 심사 소위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차

○ 용역개요 : 혼합건설폐기물 운반 302㎥, 혼합건설폐기물 처리 516ton

○ 용역기간 : 2018. 11. 05.~2019. 10. 25.(총괄)

2019. 01. 01.~2019. 10. 25.(2차분)

○ 도 급 비 : 금24,890,500원 (2차 : 23,234,670원)

○ 용 역 사 : ㈜수도환경  대표 김창순

□ 소위원회 개최 개요

○ 일   시 : 2019. 10. 22.(화) 11:00

○ 위   원 : 시설과장 외 3명

- 시설과장, 시설6급 김형식, 시설6급 문정주, 시설7급 김기봉

○ 장   소 : 시설안전부 회의실

○ 안   건 : 혼합건설폐기물 물량 증·감에 따른 설계변경 심의

- 폐기물 물량 산정은 시험굴착 및 공사진행 중 확인된 매설깊이(0~2m)에서 발생된 생활폐기물 물량을 근거로 추정하였으나, 실제굴착 결과 폐기물 추가 발생

▹ 매립재의 구성은 관악로 도로확장 전 주거민의 쓰레기 매립물과 기존구조물 철거 잔재물임

□ 계약금액 조정 근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 “제6절(과업내용의 변경과 계약금액 조정)”에 해당되는 설계변경 사항

□ 계약금액 조정 심사내용

○ 용역비 증·감 현황 : 증)2,424천원

구 분	당 초	변 경	증·감
전 체	24,890,500	27,314,830	(증) 2,424,330
2 차	23,234,670	25,659,000	(증) 2,424,330

- 2차분 사업비 증·감 대비표

공 종 명	단위	당 초			변 경			증·감
		수량	단가	금액	수량	단가	금액	수량	금액
합 계				23,234,670			25,659,000		2,424,330
1. 폐기물 운반비				3,531,889			3,901,013		369,124
혼합폐기물	㎥	281.69	12,538	3,531,889	311.13	12,538	3,901,013	29.44	369,124
2. 일반관리비	식	1	-	353,188	1		390,101		36,913
3. 이윤	식	1	-	231,771	1		252,110		20,339
4. 폐기물 처리비				17,005,580			18,783,140		1,777,560
혼합폐기물	ton	481.69	35,304	17,005,580	532.04	35,304	18,783,140	50.35	1,777,560
5. 공급가액	1+2+3+4			21,122,428			23,326,364		2,203,936
6. 부가가치세	식	1	-	2,112,242		-	2,332,636		220,394

○ 심사결과 : 적정

- 올바로시스템에 등록된 폐기물 반출량을 반영하여 설계변경함은 타당

2019년 10월 22일

위 검토자 : 계약금액조정 소위원회

팀  장 : 시설과장                 송 병 욱

팀  원 : 시설과  지방시설주사   김 형 식

시설과  지방시설주사   문 정 주

시설과  지방시설주사보   김 기 봉

붙 임 : 계약금액조정 심사 관련 서류 1부.  끝.